문서번호	정수과-9415
결재일자	2021. 11. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	광암아리수정수센터소장
박동순		방진표	11/09 이달영
협 조

사업장폐기물(무기성 정수처리오니) 처리용역 변경계약 계획

2021. 11.

광암아리수정수센터

(정수과)

사업장폐기물(무기성 정수오니) 처리용역 변경계약 계획

환경

「사업장폐기물(무기성 정수오니) 처리용역」과 관련하여 차수별 물량 조정에 따른 변경계약을 시행하여 안정적인 슬러지 처리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		계 약 현 황

건 명 : 광암아리수정수센터 사업장폐기물(무기성 정수처리오니) 처리용역

계약업체

구분	상호	대표자	주소
처리	인선이엔티㈜	***	경기도 고양시 일산동구 동국로 240
운반	㈜신용	***	경기도 성남시 중원구 둔촌대로 281길 3, 301호

계약기간 : 2021. 6. 1. ~ 2022. 5. 31.(1년)

계약금액(1차) : ***********************************

계약단가 : *******************************************

계약물량 : 4,000톤(1년)

차수	기간	금액(원)	처리물량(톤)
1차	2021. 6. 1. ~ 2021. 12. 31.	***********	*****
2차	2021. 1. 1. ~ 2022. 5. 31.	**********	*****

Ⅱ		변경계약 내역

2021년 사업장폐기물 처리현황

○ 처리기간: 2021. 6. 1.~11. 10.

○ 처리물량: ******(1차수 계약물량 대비 *******)

○ 처리금액: ************(***************************

변경내역

○ 계약금액 변경

- 1차 계약금액

· 당초: 금110,940,720원(금일억일천구십사만칠백이십원)

***************************************

○ 변경사유: 예산 137,700천원(처리량 3,000톤)으로 현재 2,998톤 처리하여 계약금액 변경

○ 차수별 물량 조정: 1차년도 감소분 893톤을 2차년도 물량에서 증가 조정

○ 계약기간, 처리단가, 총물량, 총용역부기금액은 변경 없음

○ 세부 변경내역

- 차수별 금액                                              (단위: 원)

구 분		당 초	변 경	변동사항	비고
총용역비		184,901,200	184,901,200	-
차수별	1차(2020)	110,940,720	**********	***********
	2차(2021)	73,960,480	***********	***********

- 차수별 계약물량                                          (단위: 원)

구 분		당 초	변 경	변동사항	비고
총용역물량		4,000	4,000	-
차수별	1차(2020)	2,400	****7	****
	2차(2021)	1,600	*****	****

Ⅲ		보고자 의견

2021년 슬러지케익 처리비 예산 부족에 따라 11월 08일까지 처리분에 대하여 정산 지급하고, 11월 09일 ~ 12월 31일까지의 처리물량은 2022년도 1월분 처리비에 포함하여 정산·지급하고자 함

1차 및 2차년도 처리물량 변동에 따라 설계변경하고, 1차년도 변경계약  및 2차년도 계약을 행정관리팀에 의뢰

붙임: 1. 합의서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 사업장폐기물 처리현황 1부.  끝.