문서번호	생활환경과-16473
결재일자	2021. 11. 9.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	음식폐기물관리팀장	생활환경과장
신정현	代김선례	11/09 임미경

서남센터 음폐수처리시설 개선사업

기본계획 수립 용역 기간연장 검토 보고

2021. 11.

기후환경본부

(생활환경과)

서남센터 음폐수처리시설 개선사업

기본계획 수립 용역 기간연장 검토 보고

서남센터 파업, 관련부서 과업범위 조정협의 지연, 환경부 질의회신 소요기간 등 과업수행시간 부족에 따라 용역기간을 연장(30일)하고자 함.

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 서남센터 음폐수처리시설 개선사업 기본계획 수립 용역

❍ 용역기간 : ’21.7.27. ~ 11.23.(120일)

❍ 주요과업

- 서남센터 음폐수 처리현황 조사 및 장래 음폐수 발생량 예측

- 음폐수 안정적 처리방안(음페수처리시설 개선사항) 및 자원화방안 제시

- 악취저감방안(탈취풍량, 악취저감시설 등)

- 소요 사업비 산정 및 재원조달 계획 등

❍ ****************

❍ *******************

□ 추진경과

❍ ’21.07.20. 용역 계약

❍ ’21.07.27. 용역 착수 신고

❍ ’21.10.26. 용역 중간 보고*********

□ 계약내용 변경

❍ 과업기간 연장(30일)

변경내용	당 초	변 경	비 고
계약기간	‘21.7.27.~11.23. (120일)	‘21.7.27.~12.23. (150일)	계약금액 변동없음

❍ 과업기간 연장사유

- **********************************************

- *************************************************************

- *********************************************************************

❍ ****************

□ 향후 조치사항

❍ 용역 변경계약 의뢰(재무과)

❍ 바이오가스 증산제 증산효과 추가 시험 실시(물재생시설공단) 요청

붙임 : 합의각서 1부.  끝.