문서번호	체육정책과-11083
결재일자	2021. 11. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	체육시설팀장	체육정책과장
김권웅	정경옥	전결 11/09 이창현

-「서북권 복합체육센터」건립 타당성 조사 보완관련 -

전문기관 용역 재개 검토보고

2021. 11.

체육정책과

-「서북권 복합체육센터」건립 타당성 조사 보완관련 -

전문기관 용역 재개 검토보고

건축계획 변경 검토, 은평구 협의 등을 위하여 본 용역을 일시 중지하였으나, *************************** 본 용역을 재개하고자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 서북권 복합체육시설 타당성 조사 보완 전문기관 용역

○ 계약업체 : ***********

○ 계약기간 : ’20.9.1.~’21.7.30.(333일)

- 1차 : ’20.  9. 1. ~ ’20.11.30.(91일)

- 2차 : ’20. 12. 1. ~ ’21. 7.30.(242일)

○ 용역중지 : ’21. 6. 29. (잔여31일)

***********************************************

○ 계약금액 : ************

*****************************************

○ 주요 과업내용

- 인라인경기장 과하중에 따른 구조 안전성 검토 및 사업비용 재산정

- 구조 보강 사업비 증가로 경제성 부족시 사업계획 변경(안) 제시 등

□  추진경과

○ ’20. 9. 1. : 용역착수

○ ’20.10.23. : 자문위원회 구성 및 운영계획 수립

○ ’20.11.13. : 용역 전문가 자문회의 개최

*******************************************

○ ’20.11.30. : 1차사업 준공

○ ’20.12.24. : 서울시-은평구 관계자 회의(관광체육국장, 은평구 부구청장)

**************************************************

○ ’21.3.~5.  : 은평구 제출안 전문기관 검토

***********************************************

○ 용역중지 : ’21. 6. 29. (잔여31일)

***********************************************

□ 과업재개 검토

*****************************************

********************************************************************************************************************

********************************************************************

○ 과업재개 일자 : 2021. 11. 10.(수)

○ 용역기간 변경(2차용역)

용역 착수일	당초 준공일	과업기간	용역 중지기간	******
’20.12.01.	’21.7.30.	242일	’21.6.29. ~’21.11.9.	********** *********

□ 향후일정

******************************

***********************************

*************************.