문서번호	도시철도토목부-12361
결재일자	2021. 11. 10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
엄상민		허동	11/10 최병훈
협조	주무관		노권호
	주무관		박성훈

『진접선(4호선 연장) 차량기지1공구(인입선) 건설공사 감독권한대행등 건설사업관리용역』

계약금액 조정(물가변동 2회) 검토보고(총괄2회, 3차1회)

2021. 11.

도시기반시설본부

[도시철도토목부]

『진접선(4호선 연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역』

계약금액 조정(물가변동 2회) 검토보고(총괄2회, 3차1회)

『진접선(4호선 연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역』관련 물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토 보고임. ※ ㈜동명기술공단 동기공 제2021-6549호(‘21. 11. 08.)

1		용역 개요

○ 용 역 명 : 진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

○ 용역기간 : 2018. 12. 1. ~ 2024. 10. 31.

○ 계약금액 : 금4,046,105천원

○ 계 약 자

- 토      목 : ㈜동명기술공단, ㈜천일, ㈜태조엔지니어링

- 기계, 소방 : ㈜혜원까치종합건축사사무소

- 전      기 : ㈜한국이알이시

○ 계약현황

(단위 : 천원)

구 분	계 약 일	계 약 기 간	계약금액	비 고
총 괄	2018.10.12.	2018.12.01. ~ 2024.10.31.	4,046,105
1 차	2018.10.12.	2019.01.16. ~ 2019.12.31.	445,950	준 공
2 차	2020.01.01.	2020.01.01. ~ 2020.12.31.	634,500	준 공
3 차	2020.12.11	2021.01.01. ~ 2020.12.31.	673,000	진행중
장 래	-	-	2,292,655

2		보고 내용

○ 변경 사유

- 물가변동(E/S, 2회)으로 인한 계약금액 조정(지방계약법 시행령 제73조)

․제2회 E/S : 품목조정률 3.43%

구 분	계약일	기준시점	비교시점	품목조정률	적용금액	비 고
2회	’18.10.12.	’20. 1. 1.	’21. 1. 1.	3.43%	100,263천원

○ 건설사업관리용역(총괄2회, 3차1회) 변경 현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초		변 경		증 ․ 감		비 고
	계약기간	계약금액	계약기간	계약금액	계약기간	계약금액
총 괄 2 회	’18.12.01~ ’24.10.31	4,046,105	’18.12.01~ ’24.10.31	4,146,368	변경없음	증)100,263	- 물가변동 반영(2회)
3 차 1 회	’21.01.01~ ’21.12.31	673,000	’21.01.01~ ’21.12.31	696,900	변경없음	증)23,900	- 물가변동 반영(2회)

3		조치 계획

○ 상기 보고내용과 같이「진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역」물가변동(E/S, 2회)에 따른 계약금액 조정을 시행코자 함.

붙 임) 책임감리원 검토의견 및 설계변경 내역서 각1부.  끝.