문서번호	급수운영과-18697
결재일자	2021. 11. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
강은수	류태현	11/12 이용구
협 조

설계변경 검토보고

(독산동 1071-2~1071-31번지 외 7개소 장기사용 배급수관 정비공사)

2021. 11.

남부수도사업소

(급수운영과)

설계변경 검토보고

(독산동 1071-2~1071-31번지 외 7개소 장기사용 배급수관 정비공사)

「독산동 1071-2~1071-31번지 외 7개소 장기사용 배급수관 정비공사」 업무수행 중 현장 시공여건 변화에 따른 신규공종 및 물량 증 ․ 감이 발생됨에 따라 설계변경을 시행하여 공사업무에 만전을 기하고자 함.

※추진근거: 서울시설공단 공사감독2처-15185(21.11.12)「설계변경(정산) 검토보고서 제출(독산동 배급수관)」

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 독산동 1071-2~1071-31번지 외 7개소 장기사용 배급수관 정비공사

○ 계약기간 : 2021. 6. 1. ~ 2021. 11. 17.

○ 계 약 자 : ************

○ 계약금액 : *************

○ 공사개요 : D=80~300㎜, L=1,304m

□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

- 설계변경으로 인한 계약금액 조정

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(예규 제39호)

- 제13장 공사계약 일반조건 “6(공사설계의변경)-7(계약금액의조정)”의 규정

□ 설계변경 사유

○ 공사 시행중 현장 시공여건 변화 및 상수도 공사의 특수성으로

신규공종, 자재 및 물량변동(증 ․ 감) 발생

- 신규공종 : 「아스팔트 포장절단, 200mm이하」외 105개 공종

- 신규사급자재 : 「밸브소켓(슬립인죠인트)-D=20mm」 외 14개 자재

- 물량증가 : 「아스팔트 포장깨기(굴삭기 0.18㎡(브)」 외 113여개 공종

- 물량감소 : 「아스팔트 포장절단 (200mm이하, 지세(주택가))」외 107여개 공종

○ 주요 설계변경 사유(공단 실정보고 사항 등)

- “환토재 설계누락(사급자재부분 환토재누락)” 「회의록(21. 6. 23), 공사감독2처-15100(21.11.11)」

- “7구간 작업시간 변경(주간 -> 야간)”             「급수운영과-11894(21. 7. 20.)」

- “4구간 폐기물량 증가 외 1건”             「급수운영과-12429(21. 7. 27.)」

- “7구간 교통정리원 추가배치”                「급수운영과-14516(21. 9. 2.)」

- “중간집하장 및 사토장변경”               「급수운영과-14902(21. 9. 8.)」

- “일부 도종변경 외 추가 밸브설치”         「급수운영과-17601(21. 10. 27.)」

- “확폭 및 심도증가에 따른 토공물량 증가, 5구간 교통정리원 추가배치”      「급수운영과-17918(21. 11. 1.)」

□ 설계변경 현황

○ 계약금액 변경

구 분	금 액		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
공급가액	***********	***********	**********
부가가치세	**********	**********	*********
도 급 비	***********	***********	**********	*****

○ 공사개요 변경

구 분	당 초	변 경	비고
공사개요	******************* *********	******************* *********	******** *********

○ 주요 신규공종, 자재 및 물량 증 ․ 감 내역

공 종	규 격	수 량			변동금액(원)
		단위	당초	변경
A-파쇄물운반(0.18상차비별도)	4.5DT,(현장->집하장12.9km)	㎥	신규	128	***********
C-파쇄물운반(0.18상차비별도)	4.5DT,(현장->집하장12.9km)	㎥	신규	175	***********
잔토소운반(0.18터파기동시상차)	15DT,(현장->집하장12.9km)	㎥	신규	1035	************
콘크리트 포장절단	200mm 이하, 야간	m	신규	158	*********
콘크리트 포장깨기	굴삭기(타이머) 0.18(브)	㎥	신규	15	***********
잔토소운반(0.18터파기동시상차)	15DT,(현장->집하장12.9km)야간	㎥	신규	77	***********
잔토소운반(0.6터파기동시상차)	15DT,(현장->집하장12.9km),야간	㎥	신규	285	***********

공 종	규 격	수 량			변동금액(원)
		단위	당초	변경
원형밸브실 설치공(기초재생PE)	D=100mm	개소	26	12	************
원형밸브실 설치공(기초재생PE)	D=150mm(야간)	개소	신규	2	************
하수도 복구공	PVC 100mm	m	88	23	************
하수도 복구공	PVC 150mm	m	44	0	***********
살수 및 청소	살수차 3,800L, 야간	m	신규	191	************
교통정리원	야간	인	6	16	************
새들, 주철관용(슬립)	150/25	조	1	7	************
부단수활정자관	200/100mm	개	신규	1	************
스마트 송장 시스템 운영비		㎥	1386	1397	************

□ 조치계획

○ 상기와 같은 설계변경 내역에 대하여 설계변경 심의위원회를 개최하여

심의 결과에 따라 설계변경을 시행코자 합니다.

붙임  1. 설계변경 검토보고(공단) 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 계약조정검증 확인증 1부.

4. 설계변경 사전심의 요청서 1부.  끝.