문서번호	급수운영과-18698
결재일자	2021. 11. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
강은수	류태현	11/12 이용구
협 조

설계변경 심의 결과보고

(독산동 1071-2~1071-31번지 외 7개소 장기사용 배급수관 정비공사)

2021. 11.

남부수도사업소

(급수운영과)

설계변경 심의 결과보고

(독산동 1071-2~1071-31번지 외 7개소 장기사용 배급수관 정비공사)

「독산동 1071-2~1071-31번지 외 7개소 장기사용 배급수관 정비공사」 업무수행 중 현장 시공여건 변화에 따른 신규공종 및 물량 증 ․ 감이 발생됨에 따라 설계변경 심의를 마치고 결과를 보고드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 독산동 1071-2~1071-31번지 외 7개소 장기사용 배급수관 정비공사

○ 계약기간 : 2021. 6. 1. ~ 2021. 11. 17.

○ 계 약 자 : ************

○ 계약금액 : *************

○ 공사개요 : D=80~300㎜, L=1,304m

□ 설계변경 심의위원회 개최

○ 일    시 : 2021. 11. 12.(금) 14:00

○ 장    소 : 남부수도사업소 급수운영과(3층)

○ 심의내용 : 신규공종 및 계약물량 증·감사항 심의

○ 참석위원 : 위원장 급수운영과장 외 심의위원 3명(시설관리과)

간사 및 입회자 1명

□ 설계변경 사유

○ 공사 시행중 현장 시공여건 변화 및 상수도 공사의 특수성으로

신규공종, 자재 및 물량변동(증 ․ 감) 발생

- 신규공종 : 「아스팔트 포장절단, 200mm이하」외 105개 공종

- 신규사급자재 : 「밸브소켓(슬립인죠인트)-D=20mm」 외 14개 자재

- 물량증가 : 「아스팔트 포장깨기(굴삭기 0.18㎡(브)」 외 113여개 공종

- 물량감소 : 「아스팔트 포장절단 (200mm이하, 지세(주택가))」외 107여개 공종

○ 주요 설계변경 사유(공단 실정보고 사항 등)

- “환토재 설계누락(사급자재부분 환토재누락)” 「회의록(21. 6. 23), 공사감독2처-15100(21.11.11)」

- “7구간 작업시간 변경(주간 -> 야간)”             「급수운영과-11894(21. 7. 20.)」

- “4구간 폐기물량 증가 외 1건”             「급수운영과-12429(21. 7. 27.)」

- “7구간 교통정리원 추가배치”                「급수운영과-14516(21. 9. 2.)」

- “중간집하장 및 사토장변경”               「급수운영과-14902(21. 9. 8.)」

- “일부 도종변경 외 추가 밸브설치”         「급수운영과-17601(21. 10. 27.)」

- “확폭 및 심도증가에 따른 토공물량 증가, 5구간 교통정리원 추가배치”      「급수운영과-17918(21. 11. 1.)」

□ 설계변경 심의현황

○ 계약금액 변경 - 적정

구 분	금 액		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
공급가액	***********	***********	**********
부가가치세	**********	**********	*********
도 급 비	***********	***********	**********	*****

○ 공사개요 변경 - 적정

구 분	당 초	변 경	비고
공사개요	******************* *********	******************* *********	******** *********

○ 주요 신규공종, 자재 및 물량 증 ․ 감 내역 - 적정

공 종	규 격	수 량			변동금액(원)
		단위	당초	변경
A-파쇄물운반(0.18상차비별도)	4.5DT,(현장->집하장12.9km)	㎥	신규	128	***********
C-파쇄물운반(0.18상차비별도)	4.5DT,(현장->집하장12.9km)	㎥	신규	175	***********
잔토소운반(0.18터파기동시상차)	15DT,(현장->집하장12.9km)	㎥	신규	1035	************
콘크리트 포장절단	200mm 이하, 야간	m	신규	158	*********
콘크리트 포장깨기	굴삭기(타이머) 0.18(브)	㎥	신규	15	***********
잔토소운반(0.18터파기동시상차)	15DT,(현장->집하장12.9km)야간	㎥	신규	77	***********
잔토소운반(0.6터파기동시상차)	15DT,(현장->집하장12.9km),야간	㎥	신규	285	***********

공 종	규 격	수 량			변동금액(원)
		단위	당초	변경
원형밸브실 설치공(기초재생PE)	D=100mm	개소	26	12	************
원형밸브실 설치공(기초재생PE)	D=150mm(야간)	개소	신규	2	************
하수도 복구공	PVC 100mm	m	88	23	************
하수도 복구공	PVC 150mm	m	44	0	***********
살수 및 청소	살수차 3,800L, 야간	m	신규	191	************
교통정리원	야간	인	6	16	************
새들, 주철관용(슬립)	150/25	조	1	7	************
부단수활정자관	200/100mm	개	신규	1	************
스마트 송장 시스템 운영비		㎥	1386	1397	************

□ 설계변경 심의검토 내용

○ 설계변경 타당성 : 타당

○ 신규공종 및 계약변동물량 계약단가 적정 여부 : 적정

○ 제잡비 적정 산정 및 적용 적정성 여부 : 적정

○ 각종 제분규정 준수여부 : 준수

□ 조치계획

○ 상기와 같은 설계변경 내역에 대하여 설계변경 심의위원회를 개최하여 심의한 바, 심의 결과 적정함에 따라 설계변경을 시행코자 합니다.

붙임  설계변경 심의의결서 1부.  끝.