문서번호	시설관리과-26337
결재일자	2021. 11. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		중부수도사업소장
이순필	유세종	김상웅		11/12 김정애
협 조

준공기한 연기 보고

[장위동 219-284∼223-68번지 외 10개소 장기사용 배급수관 정비공사]

2021. 11.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

준공 기한 연기 보고

우리 사업소에서 시행 중인 「장위동 219-284~223-68번지 외 10개소 장기사용 배급수관 정비공사」와 관련하여 도종 변경등으로 인한 도로굴착 허가 지연 등의 사항으로 절대공기가 부족한바, 준공기한을 연기하여 공사 시행에 만전을 기하고자 함.

※ 관련: 공사감독2처-14993(2021. 11. 9.)「준공기한 연기 검토 보고서 제출(장위동 배급수관)」호

Ⅰ		공 사 현 황

○ 공 사 명: 장위동 219-284~223-68번지 외 10개소 장기사용 배급수관 정비공사

○ 공사기간: 2021. 4. 30.~2021. 11. 25

○ 계약금액: ************

○ 공사개요: ************************

○ 계약업체: **************

○ 공 정 률: 89%(2021. 11. 8. 현재)

Ⅱ		연 기 사 유

교통소통대책 자문회의 심의 지연 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥14일

○ 7구간****************** 확인굴착 결과, 지장물로 인하여

일부구간 관로 부설 위치 및 도종 변경(A-1→소형고압블록)

○ 굴착허가 재접수 및 승인대기로 인한 굴착 지연(성북구 2021-상수-00377)

Ⅲ		검 토 의 견

준공기한 연기 시행 타당 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥14일

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제8절 2항에 따라 발주기관의 책임으로 착공이 지연된 경우로써 절대 공기 부족한바 14일 연기는 타당함

계약금액	당 초	******************************
	변 경	******************************
	증․감액	********
계약기간	당 초	*****************************
	변 경	*****************************

Ⅳ		조 치 계 획

지체상금 부과 여부: 미부과(발주기관 책임)

준공기한 연기에 따른 변경계약 요청(시설관리과→행정지원과)

○ 당초: **************************

○ 변경: *************************

변경사항에 대해 서울시설공단 및 계약사로 통보

붙임  공단 공문 및 관련 보고서 각 1부.  끝.