문서번호	시설관리과-19340
결재일자	2021. 11. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
조광희	조규환	11/12 代조규환
협 조

「미아동699-31 ~698-29 외7개소 장기사용배급수관 정비공사」

현  장  실  정  보  고

2021. 11.

현  장  실  정  보  고

『미아동699-31 ~ 698-29 외7개소 장기사용배급수관 정비공사』와 관련하여 감독업무 수행중인 서울시설공단으로부터 현장실정보고서(구간별 도종변경)가 제출되어 검토결과를 보고드림.

□ 추진근거

○ 현장실정 보고서 제출 **********************************

□ 공사현황

○ 공 사 명 : *************************************

○ 공사개요 : **************************

○ 공사기간 : *************************

○ 도 급 비 : ************

○ 도 급 자 : *************

□ 보고내용

○ 1구간(D=80mm, L=93m)은 당초 소형고압블록으로 설계되었으나 시점부와 종점부 일부가 A-2(L=20m) 및 C-2(L=7m)로 확인됨.

○ 2구간(D=100mm, L=221m)은 당초 A-2로 설계되었으나 시점부 일부가 CA-2(L=55m)로 확인됨.

○ 5구간(D=100mm, L=70m), 6구간(D=80mm, L=97m), 및 7구간(D=100mm, L=88m)은 당초 A-2로 설계되었으나  전구간 CA-2로 확인됨.

○ 8구간(D=100mm, L=159m)은 당초 A-2로 설계되었으나 일부구간이 CA-2(L=141m)로 확인됨.

○ 현황사진

[1구간 ]	[2구간 ]
[5구간 ]	[6구간 ]
[7구간 ]	[8구간 ]

○ 구간별 폐기물 변경 현황

구분	당초 폐기물량(㎥)		당초 폐기물량(㎥)		비고
	아스콘	콘크리트	아스콘	콘크리트
1구간	-	-	3	1
2구간	33	-	28	10
5구간	12	-	4	14
6구간	16	-	6	19
7구간	14	-	6	18
8구간	25	-	11	27
계	100	-	58	89

○ 현장 점검결과 당초 1, 2, 5, 6, 7, 8구간의 도종변경에 따른 토공 및 폐기물량 증 · 감 사항은 추후 설계변경시 반영하여 처리코자 함.

※ 환토, 잔토 되메우기는 A-2를 기즌으로 시공처리

○ 계략공사비 : 증)9,200천원

○ 건설폐기물 처리용역 : 증)4,500천원

□ 검토결과

○ 서울시설공단에서 제출한 현장실정보고(구간별 도종변경)에 대하여 검토한 결과 상기 보고내용과 같이 적정하므로 승인 통보하고 추후 설계변경시 정산하여 반영코자 합니다.

2021. 11.

보고자 : 지방시설주사   조 광 희

붙임  현장실정 검토보고 및 실정보고서 1부. 끝.