투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	변경계약 의뢰(진접선 1공구 건설사업관리용역, 총괄2회 및 3차1회)

우리본부에서 시행중인『진접선(4호선 연장)1공구(인입선) 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역』에 대하여 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 진접선(4호선 연장) 1공구(인입선) 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

나. 계 약 자 : ㈜동명기술공단종합건축사사무소 대표이사 신 완 수

다. 변경계약 현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초		변 경		증․감		비 고
	계약기간	계약금액	계약기간	계약금액	계약기간	계약금액
총괄 2회	’18.12.01~ ‘24.10.31	4,046,105	’18.12.01~ ‘24.10.31	4,146,368	-	증)100,263
3차 1회	’21.01.01~ ‘21.12.31	673,000	’21.01.01~ ‘21.12.31	696,900	-	증)23,900

라. 변경사유

○ 물가변동(E/S, 2회) 반영

마. 예산과목

○ 도시철도건설, 도시철도건설사업, 진접선(4호선연장)차량기지건설, 시설비 및 부대비, 감리비

붙 임 : 검토보고서 등 관련 자료 1부.  끝.

	도시철도토목부장
주무관	엄상민		토목1과장	허동		도시철도토목부장	11/12 代허동
협조자	주무관	노권호
시행	도시철도토목부-12477	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8 프리미어플레이스9층	/
전화	772-7214	/전송	772-7306	/		/	대시민공개