문서번호	건축부-18258
결재일자	2021. 11. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
손남기		차무흥	11/12 신명승
협조

-시립마포 실버케어센터 건립공사- 계약변경(공사기간 연장) 검토 보고

2021. 11.

도시기반시설본부

(건   축   부)

-시립마포 실버케어센터 건립공사- 계약변경(공사기간 연장) 검토 보고

「시립마포 실버케어센터 건립공사」관련 건설사업관리단으로부터 공사기간 연장에 대한 실정보고가 제출되어 검토 보고 드림.

1		사업개요

○ 위    치 : 서울특별시 마포구 백범로 21 (舊, 한국산업인력관리공단 )

○ 규    모 : 지하2층/지상4층, 연면적 12,271㎡

○ 공사기간 : (3차)‘21.01.16. ~ ’21.12.14. (총차:‘19.04.15. ~ ’21.12.14.)

○ 공 사 비: (3차)금9,093,549,000원 (총차:금16,316,549,000원)

○ 시 공 사 : 혁성공영㈜, ㈜태왕이앤씨

○ 감 리 사 : ㈜유탑엔지니어링, ㈜아이티엠코퍼레이션

○ 공 정 률 : (계획) 96.76% (실적) 93.86%, (대비) 97%

2		추 진 경 위

○ ‘19. 04. 15. : 공사착공

○ ‘19. 05. 15. : 설계용역 준공

○ ‘19. 08. 06. : 서울창업허브단지 시험동 철거 완료

○ ‘20. 02. 20. : 골조공사 완료

○ ‘21. 11월 현재.  내·외부 마감공사 중

3		계약변경(공기연장) 검토

□ 관련근거

- 지방자치단체 공사계약 일반조건 제8절의 2 (계약기간의 연장)

- 복지재단 민원으로 인한 공사계약기간 조정요청[유탑(마실)21-218호(’21.11.03)]

□ 공기연장 검토

***********************************************

******************************************************************************************************************

□ 계약변경 내용

***		***	***	***		**
****	**	********************	*******************	**	***
	**	********************	*******************	**	***

□ 예정공정표 및 공정률 검토

- `21.12.14일까지 본공사(시립마포 실버케어센터 건립공사)를 완료하고(97.82%),

`22.3.14.일까지 도로공사 완료(100%)

4		건설사업관리자 검토의견

□ 예정공정표 및 예정공정율을 검토한 결과 적정하며, 원할한 사업수행을 위하여 공사기간을 변경(90일 연장)함이 타당함

5		처리의견

□ 공사계약 일반조건 제8절 1-다. 규정에 따라 지체된 공정지연 일수가 **********************계약상대자의 요청 및 건설사업관리자 의견에 따라 공사기간을 연장(변경계약) 처리코자 함.

붙임  공사기간 연장 요청 서류 1부. 끝.