문서번호	수질연구과-9864
결재일자	2021. 11. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	수질연구과장	수질분석부장		서울물연구원장
송경인	代박준진	이상미		11/15 김혜정
협 조
	주무관		김은정

연구개발과제 변경 추진 보고

2021. 11.

수질연구과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

연구개발과제 변경 보고

진행 중인 연구개발과제의 효율적인 수행을 위하여 과제명, 기간 및 연구원을 변경하여 추진에 만전을 기하고자 함

□ 배경 및 목적

○ 소형 생물 민원, 고형물 검출 관련 필터 변색 등 대내외 여건변화와 최근 민원 발생 이슈 사항에 대한 연구개발과제에 추가

○ 인사이동에 따른 참여 연구원 변화 및 한강 상수원 장기 수질동향 분석, 3차원 조류 예측 모델링 구축 등 다양한 현안업무 수행에 따른 연구과제 수행 시간의 확보가 필요

○ 연구개발과제의 구체화와 기간의 변경에 따른 내실있는 연구개발 과제의 수행

□ 과제 개요

연번	구 분	내 용
1	과제명	상수도 수질서비스 품질향상을 위한 민원 사례 분석
	과제기간	2020년 1월 ~ 2021년 12월
	과제내용	상수도 발생 민원 사례 분석(지역, 원인 등)
2	과제명	맛‧냄새 물질 사전대응 가능한 한강 원수 예측 모델 개발
	과제기간	2020년 7월 ~ 2022년 6월
	과제내용	여러 가지 통계적 기법 및 머신러닝 기법의 적용성을 검토한 후 취수 원수 맛‧냄새 물질 농도를 사전에 예측하는 최적모델을 개발

□ 변경 내용

○ 연구과제 과제명의 구체화

- (기존) 상수도 수질서비스 품질향상을 위한 민원 사례 분석

- (변경) 상수도 수질서비스 품질향상을 위한 민원 사례 분석

(소형생물 및 수도꼭지 필터 민원 사례와 대응 중심)

○ 민원 이슈에 따른 연구과제 내용의 추가

- 상수도 계통의 소형생물 발생 민원 사례

- 필터 변색에 따른 변색 성분 분석 및 이물질 분석 DB 구축

○ 연구기간, 연구참여자 등 변동 사항

연번	구 분	기 존	변 경
1	과제명	상수도 수질서비스 품질향상을 위한 민원 사례 분석	상수도 수질서비스 품질향상을 위한 민원 사례 분석 - 소형생물 및 수도꼭지필터 사례 중심
	과제기간	2020년 1월 ~ 2021년 12월	2020년 1월 ~ 2022년 12월
	책임연구원	송경인	변동없음
	연구원	박창민, 김영돈, 백경복, 박현, 김복순	송만식, 박준진, 김상은, 이상미
2	과제명	맛‧냄새 물질 사전대응 가능한 한강 원수 예측 모델 개발	변동없음
	과제기간	2020년 7월 ~ 2022년 6월	2020년 7월 ~ 2022년 12월
	책임연구원	김은정	변동없음
	연구원	조은주, 박창민, 정종순, 박현, 김복순	최연규, 송만식, 황광호, 김상은, 이상미

□ 향후계획

○ 연구기획과 통보 및 연구관리시스템 계획서 변경관리

○ 연구개발과제 적기 수행 및 기한 내 보고서 작성

붙임 : 변경된 연구계획서 각 1부.  끝.