문서번호	도로계획과-14686
결재일자	2021. 11. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	민자사업팀장	도로계획과장	안전총괄관		안전총괄실장
김정식	안준수	권완택	박진순		11/15 한제현
협 조

서부간선지하도로 민간투자사업 총사업비 변경 승인 검토 보고

2021. 11.

안전총괄실
(도로계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□	서서울도시 고속도로(주)
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「서부간선지하도로 민간투자사업」

총사업비 변경 승인 검토 보고

사업시행자인 서서울도시고속도로㈜로부터 서부간선지하도로 민간투자사업에 대한 총사업비 변경 승인 요청이 있어 검토 보고드림

□ 사업개요

○ 위    치 : 영등포구 양평동(성산대교남단) ~ 금천구 독산동(금천IC)

○ 규    모 : 폭 양방향 4차로, 연장 10.33km (소형차 전용)

○ 사업기간 : 2010. ~ 2021.8.31.

○ 총사업비 : 519,961백만원 ('07.7.31. 불변가격 기준)

○ 사업시행자 : 서서울도시고속도로㈜ - 현대건설 등 8개사

□ 주요 추진경위

○ ’07.12.20 : 민간제안서 제출(현대건설 등10개사)

○ ’15.03.11 : 실시협약 체결 / ’15.12.03 : 실시계획 승인

○ ’16.03.01 : 공사착공

○ ’16.12.21 : 환기방식 변경(행정2부시장 방침 제243호)

○ ’20.04.28 : 공사기간 연장(60 → 66개월)

○ ’21.01.08 : 총사업비(공기정화설비) 변경 요청(사업시행자 → 도기본)

○ ’21.04.15 : 공기연장에 따른 간접비 청구(사업시행자 → 도기본)

○ ’21.06.28 : 총사업비(기계·전기분야) 변경 요청(사업시행자 → 市)

○ ’21.07.08 : 총사업비(토목분야) 변경 요청(사업시행자 → 도기본)

○ ’21.08.25 : 총사업비 변경 검토결과 송부(도기본 → 도로계획과)

○ ’21.09.01 : 개통

2		총사업비 변경내용 검토

가.		사업시행자 요청내용

□ 총사업비(변경) 요청내용

○ 실시협약 기준 5,199.61억원에서 ********억원으로 ***********
요청함

- *******************************

- ***********************************

- ******************************

- ******************************

- ******************************

[ 총사업비(변경) 요청내용 ]

(단위 : 백만원, ’07.7월 불변가 기준)

구 분	실시협약(’15.3)	변경	증 감
조사비	630	***	*
설계비	14,607	******	*****
보상비	2,839	*****	****
공사비	458,406	*******	******
부대비	27,298	******	****
운영설비비	11,555	******	*****
제세공과금	11	*	**
영업준비금	4,615	*****	***
총사업비	519,961	*******	******

[ 총사업비(변경) 세부 요청내용 ]

(단위 : 백만원, ’07.7월 불변가 기준)

구 분		실시협약(’15.3)	금회신청	증 감	비 고
***		******	******	*****
***		*****	*****	****
***		*	******	******
	******	*	*****	*****	***
	************	*	***	***	***
	*********		***	***	***
	************		***	***	***
	********		**	**	***
	**********	*	******	******
	*********	*	*****	*****
	****	*	**	**
***		******	******	****
	*******	******	******	****	***
	*****	***	***	****	***
	*********	***	***	**
	*****	*****	*****	***
	*********	***	***	**
	*****	*****	*****	**
*****		*****	*****	*****
	*******	*****	*****	*****	*********
	******	**	*	***
*****		**	*	**
*****		*****	*****	***
합계금액		******	******	******

나.		총사업비 검토

□ 검토 기준

○ 실시협약상 사업비 변경 타당성 확보 여부, 주무관청 승인 여부, 사업비 검토 여부를 확인하여 변경 적용 판단

□ 검토 내용

〔원안 반영〕

○ ****************************************************************************************************************************은 사업비 변경 타당성 등을 검토 후 총사업비 변경 승인 완료된 사항임

○ 기승인 7건 외 11건에 대해 사업비 검토 결과가 적정하여 총사업비 변경 요청 내용대로 승인 반영

- *****************************************************************************************************

- **************************************

- ***************************************************************************************************************

□***********************************

□***************************************

□********************************************총사업비 반영

- ********************************************************************************************************************************************

□***********************************************

□*********************************************

- *****************************************************************************

- ***********************************************************************************************

- *******************************************

************************************

- ***************************************

*****************************************************************

- *************************************************

- ************************************************

*******************************************

- ********************************************

*********************************

〔감액 반영〕

○ *****

- *************************************************************************************************************

**************************************************

○ *********

- ********************************************************************************************

□ 종합 검토의견

〔총사업비 반영 검토결과〕

○ 사업시행자가 변경(증액) 요청한 ****************************************승인코자 함

- ****************

- *******************

○ 총사업비는 ********억원(’07.7월 불변가 기준)으로 변경

[ 총사업비(변경) 승인 집계표 ]

(단위 : 백만원, ’07.7월 불변가 기준)

구 분		실시협약(A)	신청(B)	승인(C)	증감
					(C-B)	(C-A)
***		******	******	******	*	*****
***		*****	*****	*****	*	****
***		*	******	******	*	******
	******	*	*****	*****	*	*****
	************	*	***	***	*	***
	*********		***	***	*	***
	************		***	***	*	***
	********		**	**	*	**
	**********	*	******	******	*	******
	*********	*	*****	*****	*	*****
	****	*	**	**	*	**
***		******	******	******	****	****
	*******	******	******	******	*	****
	*****	***	***	***	*	****
	*********	***	***	***		**
	*****	*****	*****	*****	****	**
	*********	***	***	***	***	**
	*****	*****	*****	*****	*	**
*****		*****	*****	*****	*	*****
	*******	*****	*****	*****	*	*****
	******	**	*	*	*	***
*****		**	*	*	*	**
*****		*****	*****	*****	*	***
****		******	******	******	****	******

[ 총사업비(변경) 내역 ]

(단위 : 백만원, ’07.7월 불변가 기준)

구 분		실시협약(A)	신청(B)	승인(C)	증 감
					(C-A)	(C-B)
***		***	***	***	*	*
***		******	******	******	*****	*
***		*****	*****	*****	****	*
***		*******	*******	*******	******	*
***		******	******	******	****	****
*****		******	******	******	*****	*
*****		**	*	*	**	*
*****		*****	*****	*****	***	*
****		*******	*******	*******	******	****
	*****	*******	*******	*******	******	****
	***	*****	*****	*****	****	*
	*****	*******	*******	*******	***	*

〔재원 조달방안〕

○ 증액 사업비중 ******************************************가 조달

- **********************************************************************************는 건설보조금으로 조달

□ 조치사항

○ 총사업비 변경 승인내용을 서서울도시고속도로㈜, 토목부, 설비부에 통보

○ 금번 감액된 사업비는 추후 통행료 조정에 반영

- ****************************

3		향후계획(안)

○ ’21.11.	: 총사업비 변경 승인 통보

○ ’21.11.	: 간이적격성 보고서 제출(사업시행자)

○ ’21.12.~’22.02.	: 간이적격성 보고서 검증(회계전문기관)

- 실시협약서 변경 협상 병행 추진(수요위험의 처리 조항 삭제 등)

○ ’22.03.~05.	: 기재부 사전협의 시행

○ ’22.06.	: 실시협약 사전심사(서울공투, 법률지원담당관)

○ ’22.07.~08.	: 시 재정계획심의, 기재부 민간투자심의

○ ’22.09.	: 시의회 상임위 보고 및 변경협약 체결

붙임  총사업비 변경 검토 보고서(도시기반시설본부) 1부. 끝.