(발주처 작성서식)

실정보고 검토서

공 사 명

올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사(조경)

공사개요

· 위    치 : 올림픽대교 남단(송파구 풍납2동)

· 규    모 : 신설 1.6㎞, 이설 1.3㎞

· 공사기간 : ‘16.04.01.~’22.12.31.

· 도 급 비 : 502억원

· 시 공 사 : ㈜덕일 외 2개사

· 감 리 단 : ㈜이산 외 2개사

· 설 계 사 : ㈜대한콘설탄트

실정보고 건명

한가람로 진입램프 공사를 위한 수목이식 및 제거 수량변경

*************************

실정보고 사유

관계기관 협의 의견 반영 및 현장여건 변동 등

- 송파구청 협의결과***************************

· 당초 은행나무(6주)를 제거에서, 지정장소로 이식 (제거 6주→이식6주)

- 현장여건 변동 사항

· 진입램프 : 이식 소나무 4주 중 2주 고사 (이식 4주 → 이식 2주, 제거2)

· 조각공원 : 이식 소나무 4주 중 2주는 저촉되지 않아 존치

건설사업관리단

검토의견

- 수목이식 및 제거의 수량 변경은 관계기관(송파구청) 협의 결과와 현장 내 여건 변동으로 설계에 반영함이 타당함.

공기에 미치는 영향

해당없음

변경(안)

- 변경사항 및 공사비 증감사항

구 분			수 량		*******		*** ********
			당 초	변 경	***	***
본선
은행나무 제거	ver	주	30	24	4,284	3,408	- 876
은행나무 이식	ver	주	-	6	-	2,938	2,938
소나무 이식	ver	주	4	2	3,367	1,753	- 1,614
한가람로
소나무 제거	ver	주	-	2	-	48	48
소나무 이식	ver	주	4	2	1,052	544	- 508
직접비					8,703	8,691	- 12
간접비					4,097	3,909	- 188
도급비					12,800	12,600	- 200

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

해당사항 없음

발주처

검토의견

- 본 실정보고는 유지관리기관의 요청사항과 현장여건 변경사항을 반영한 부득이 발생한 사항이며, 본 실정보고가 타당함에 따라 승인처리하고 추후 설계변경 반영코자 함.

비 고

************************

결재

주무관

김현곤

공원시설과장

이병호

방재시설부장

전결 11/15

박홍봉

협조

주무관

김규희