문서번호	치수과-7283
결재일자	2021. 11. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	치수과장	시설부장		한강사업본부장
전조연	최연호	박상보		11/15 황인식
협 조
	총무부장		송영민
	총무과장		정현석
	기획예산과장		안인숙
	기반시설과장		代정창수

「선유도 보행잔교 및 한강수상갤러 조성 기본 및 실시설계용역」

중간보고 및 자문회의 개최 결과보고

2021. 11.

한강사업본부

(치수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

『선유도 보행잔교 및 수상갤러리 조성사업 설계용역』

중간보고 및 자문회의 개최 결과보고

「선유도 보행잔교 및 수상갤러리 조성사업 설계용역」추진사항에 대한 중간보고 및  전문가 자문회의 개최 결과에 대한 보고임.

□ 중간보고 및 자문회의 개최 개요

○ 일    시 : ’21. 11. 4.(목) 10시 ~ 12시

○ 장    소 : 본부 2층 대회의실

○ 참 석 자 : 본부장, 시설부장, 치수과장, 기전설비과장 및 관련 외부 전문가

- 외부 전문가

분야	소속	직위	성명
****	*************	**	***
****	***********	**	***
****	*******	***	***
****	**************	***	***

○ 주요 보고 및 자문내용

- 설계공모 당선자의 추가 제안사항의 적정성 및 수용 필요에 대한 의견

- 수용시 설계단계에서 검토되어야 할 사항 등 기타 전문가 의견

- 투자심사 조건부(보행잔교와 월트컵 분수 연계 설치 필요성 재검토) 의견

[사업개요]

‣ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.

‣ 총사업비 : 11,247백만원

‣ 주요 사업내용

- 보 행  잔 교 설치 : 상부(고정교) 192m, 하부(부교) 158m

- 수상갤러리 조성 : 직경 21m, 높이 10m(월드컵분수 재활용)

□ 주요 자문의견

① (공모 추가제안) 수막스크린 설치	반영 필요

○ 제안내용 : 보행잔교 상단에서 하상으로 직하 분수 및 연출 설비 설치

- 설치위치 : 보행잔교 3면 중 강심 측 1면

- 설치규모 : 폭 83.0m, 높이 15.12m, 수막면적 1,255㎡

○ 주요 자문의견

- 분수 연출 시뮬레이션과 월드컵 분수 연출과 상호연계된 시나리오 필요함.

- 원경에서의 효과극대화 중요함(조명효과+점수효과)

- 조망점을 고려한 설치검토 필요(원거리, 근거리), 한강 바람에 따른 낙수유입 등 고려 노즐분사식과 조명을 연계한 퍼포먼스 연출 필요함.

- 한강물 사용시 유지관리문제, 악취 등 민원발생 문제 등 상수도사용이 적합하며, 수압이 낮을 경우 저수조 설치하여 가압펌프 사용 검토

- 한강물 사용시 악취․살균 장치, 노즐 막힘현상 제거를 위한 필터장치 및  관리방안 검토 필요

② (공모 추가제안) 테마가 있는 보행교	반영 필요

○ 제안내용 : 보행잔교 보도폭 확대하여 경관 조망공간 조성

- 보도폭 확대 : 강심측 보행잔교 폭 4.0m → 6.0m

- 조망공간 설치 : 폭 6.0m × 연장 83.0m, 면적 498㎡

○ 주요 자문의견

- 구체적인 동선 시나리오와 연결 필요함.

- 적정한 위치에 추가 바람직함.

- 단주기둥으로 6m 폭을 지지하는 것은 면밀한 검토가 필요함. 복주 적용,  횡방향 빔 강성확보, 난간 풍하중 배제 등 검토가 필요함.

- 난간은 강풍이나 사람에 의해 파손될 수 있는 유리보다 알미늄 난간이 좋을 것임.

③ (투자심사 조건사항) 보행잔교와 월드컵 분수 연계 필요성	연계 필요

○ 투자심사 조건사항 : 보행잔교와 월드컵 분수의 연계 설치 필요성에 대해

재검토할 것.

○ 주요 자문의견

- 설계공모 당선작으로 선정된 사항으로 연계 추진해야 함.

- 보행잔교의 중정내부에 수상갤러리 위치 필요함.

- 월드컵 분수를 보행잔교 내측 설치하여 계류안전성을 확보하는 것이 필요함.

- 보행잔교와 월드컵분수를 연계설치해야 시너지효과가 나올것으로 판단됨.

④ 기타 자문의견

○ 주요 자문의견

- 하부 브릿지 홍수시 수평유격(1~2m) 처리방안 검토 필요

- (월드컵분수 조명관련) 내부연출에 따라 조명방식 선택 필요, 하부노출 설비 조명, 메인 천장조명은 외관과 연동한 점조명등 효과 전반적 검토 필요

- 워터스크린 분수 사용용수의 재활용 방안 검토

- (승강기 관련) 나뭇잎 형태의 외장재는 관리 방안 수립 필요, 옥외 승강기의 방수․방충․환기 등에 대한 대책 수립 필요

□ 자문회의 결과 조치계획

○ 설계공모 제안사항은 본 과업에 포함 추가 설계 시행

- 외부전문가 전원 반영필요하다는 의견이며, 본 사업 투자심사시 반영되었던 사항으로 사업효과 극대화를 위해 반영함이 적절한 것으로 사료됨.

- 추가 설계시 외부전문가 자문의견 사항 검토 및 반영토록 조치

○ 추가설계에 따른 설계비 반영 (증액)

- 설계공모시 추가 제안사항으로 이를 반영할 경우 추가 설계비 반영이 필요함.

************************

- 용역별 추가설계비

*******	****	*********
*		*******
*********	****************** ********************	******
**********	*************** ********************	*******

- 예산조치 : 2022년 본예산 활용

○ 추가과업 및 용역 중단기간에 따른 준공기한 연기

- 자문결과 설계공모 제안사항 추가설계 소요기간 및 투자심사를 위한 과업중단 기간을 반영하여 용역기간 연장 필요

․ 준공기한 연기 : (당초) ’21.12.31 → (변경) ’22.6.30

○ 보행잔교와 월드컵 분수 연계 설치 추진

- 자문결과 사업효과 및 월드컵 분수의 계류 안전성 확보를 위해서도 연계설치 필요하다는 의견이며,

- 당초 설계공모시 보행잔교와 월드컵 분수 연계를 조건으로 공모시행했던   사항으로, 이를 분리할 경우 당초 공모심사 결과 적정성에 문제소지가 있음.

※ 설계공모지침서 Ⅲ-1-1.1 기본방향

․ 수상갤러리 : 보행잔교와 연계하여 선유도 공원과 강심에 설치하는 수상 시설의 새로운 관계를 갖는다.

□ 행정사항

○ 용역 계약변경 및 준공기한 연기 의뢰 : 총무과

○ 자문의견 및 조치계획에 대해 검토 반영토록 조치 : 본부→계약상대자

첨부 1. 자문의견서 각 1부

2. 추가설계비 산출내역 각 1부. 끝.