문서번호	시설관리과-19414
결재일자	2021. 11. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
조광희	조규환	11/15 代조규환
협 조

「미아동699-31 ~698-29 외7개소 장기사용배급수관 정비공사」

현  장  실  정  보  고

2021. 11.

현  장  실  정  보  고

『미아동699-31 ~ 698-29 외7개소 장기사용배급수관 정비공사』와 관련하여 감독업무 수행중 변경사항이 발생하여 검토내용을 보고드림.

□ 공사현황

○ 공 사 명 : *************************************

○ 공사개요 : **************************

○ 공사기간 : *************************

○ 도 급 비 : ************

○ 도 급 자 : *************

□ 보고내용

○ 미아동 장기사용배급수관 정비공사 시행중 철거된 기존관로에 대하여 고재처리 조치가 필요한 실정임.

○ 공사구간 8개소가 일정한 장소가 아닌 강북구 관내 전 지역에 흩어져 있어 공사 진행시 근로자들이 화장실 및 휴게공간등으로 활용할 수 있는 근로자편의시설이 필요한 실정임.

※상수도공사장 근로자 근무여건 개선계획 [계회설계과-1851(2020.02.18.)]

○ 상기 제요율적용제외공정 사항에 대하여 당초 설계 발주시 포함 되어 있어야 하나 누락으로 인하여 추가공정이 필요한 실정이며 추후 설계변경시 반영하여 처리코자 함.

○ 계략공사비

- 고재처리비 : 감)3,900천원

- 근로자 편의시설 : 증)6,100천원

□ 검토결과

○ 상기 제요율적용제외공정 사항에 서울시설공단에서 추가 작업지시 하고 추후 설계변경시 정산하여 반영코자 합니다.

2021. 11.

보고자 : 지방시설주사   조 광 희