문서번호	산지방재과-10282
결재일자	2021. 11. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		사면정비팀장	산지방재과장
최서영		유현선	11/16 윤방식
협 조

『산사태예방사업 시공품질 향상 및 안전성 확보』를 위한 2021년 하반기 산사태 예방사업 현장점검 계획

2021. 11.

푸른도시국

(산지방재과)

『산사태예방사업 시공품질 향상 및 안전성 확보를 위한』

2021년 하반기 산사태예방사업 현장점검 계획

’21년 우기철 국지성 호우로 인해 추가 산사태예방사업 현장을 대상으로 공사장 안전관리 실태 등을 점검하여 시공품질 향상 및 안전사고를 예방하고 동절기(12월말) 공사완료 될 수 있도록 공정관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진개요

□ 추진목적

❍ ’21년 하반기 산사태예방사업 시행중인 공사현장에 대한 설계심의 이행여부

❍ 시공품질 향상 및 공사현장 안전성 확보로 안전사고 예방

❍ 동절기(12월말) 사업완료를 목표로 공정점검 및 시공 독려

□ 추진경위

❍ ’21.09. ~ ’21.10. : 사업계획수립 및 실시설계

❍ ’21.10. ~ ‘21.11.  : 일상감사 및 공사발주

❍ ’21.11.  ~ ‘21. 12. : 공사시행 및 준공(’21.11.15.현재 공정률 약 88%)

Ⅱ		사업추진 현황

□ 사업개요

❍ 사업위치 : 동작구 사당동 산31-1번지 등 5개소

❍ 사업기간 : 2021. 10. ~ 2021.12.

❍ 사업대상 : 위험절토사면 4개소, 사방사업지 1개소

❍ 사 업 비 : 399백만원(사면정비 110, 사방사업 289)

❍ 추진방법 : 사업부서로 사업비 재배정 시행

□ 사업추진 현황

❍ 대상지 별 공사추진 현황

기관명	위 치	현 공정률	소요예산(천원)
계	총 5개소	88%	*******
종로구 (1개소)	종로구 사직동 262-197	100%	********
중부사업소 (1개소)	중구 예장동 산5-6	100%	********
동작구 (1개소)	동작구 사당동 산31-1	55%(공사중)	*******
노원구 (2개소)	노원구 중계동 산95-1 등 2개소	95%(공사중)	********

Ⅲ		현장 점검계획

□ 점검방향

❍ 현장점검 시 외부전문가와 합동 현장점검 실시

❍ 동절기(12월) 공사완료 목표 강구

□ 점검개요

❍ 점검기간 : ’21.11.22.(월)~11.26.(금) 5일간

❍ 점검대상 : 종로구등 5개소(붙임2 참고)

- 서울시 점검대상 : 종로구등 5개소

❍ 점검방법 : 사면정비팀(3명) 및 외부전문가(2인) 현장 순회점검

□ 주요 점검내용

❍ 주요공정 등 사업내용 임의 변경 여부

❍ 사방시설물 시공의 적정성 및 안전성 확보

❍ 동절기(12월말) 공사완료 가능 여부 및 독려

❍ 예산집행의 타당성(집행잔액, 낙찰차액 사용 내역 등)

❍ 공사로 인한 시민 불편사항 발생 등

□ 시 점검 세부내용

❍ 점검대상 : 5개소(금회 점검 5개소)

❍ 점검자(5명) : 사면정비팀장등 3명, 전문가 2명(산림기술자등)

구 분	계	종로구	동작구	노원구	중부사업소
점 검 대 상	5개소	1	1	2	1

Ⅳ		행정사항

□ 자치구 및 사업소 협조사항

❍ 점검자료 준비 및 공사장 위치 안내(사업소 포함)

❍ 점검일시·장소 등 세부사항은 점검전 별도 협의

□ 점검결과 조치

❍ 현장조치 가능한 경미한 지적사항은 현장시정 조치

❍ 시일이 필요한 지적사항은 공사완료 전 시정 조치

❍ 장기적 검토가 필요한 사항은 별도 조치계획 수립 추진

□ 외부전문가 자문 수당 및 방역용품(소모품) 지급(시 점검)

❍ 소요예산

- 5일×282천원×2인 =********

(1일 특급기술자 노임단가 적용)

- 현장점검시 필요 경비 지급 :******

(현장점검시 사무용품(야장기입 용품 등) 및 소모품 구입 등)

❍ 예산과목 : 산림안전관리, 산림내 사면정비, 사무관리비(100-201-01)

Ⅴ		향후 추진일정

❍ ’21. 11. 17.           : 점검계획 통보(시 → 자치구, 사업소)

❍ ’21. 11. 22. ~ 11.26. : 시·자체 점검실시

❍ ’21. 11. 30.              : 점검결과 보고(시)

붙임 : 1. 공사장 점검표 제출양식 1부.

2. 점검결과 및 조치계획 제출양식 1부.  끝.