문서번호	설비부-16232
결재일자	2021. 11. 16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
김진영	김현기	11/16 김호성

『서울시네마테크 건립 전기공사』

관급자재 납품기한 연기 검토보고

2021. 11.

도시기반시설본부

(설비부)

「서울시네마테크 건립 전기공사」

관급자재 납품기한 연기 검토보고

「서울시네마테크 건립 전기공사」관급자재(무정전전원장치 외 5건) 납품기한 연기에 대해 보고 드림

1		공사개요

□ 공 사 명 : 서울시네마테크 건립 전기공사

□ 위    치 : 서울특별시 중구 마른내로 38

□ 공사기간 : ’20.02.07.~’22.12.10.

□ 감 리 사 : ㈜종합건축사사무소근정

2		관련근거

□ 관급자재 납품일정 변경 검토보고[근정시네 제2021-375(2021.11.11.)호] 외 5건

3		검토내용

□ 계약현황

품 명 (납품요구번호)	계약금액	납품기한	계 약 자
무정전전원장치 (12-19-2-56419-00)	***********	**********	***********
비상발전기 (12-20-2-81378-00)	***********	**********	**********
빌딩자동제어장치 (12192197100)	************	**********	****
조명기구 (12-20-6-26966-00)	***********	**********	********
LED실내조명등 (12-20-1-05131-00)	**********	**********	********
LED실내조명등 (12-20-1-05135-00)	***********	**********	********

□ 납품기한 연기사유

○ 건축공사 준공기한이 연장됨에 따라 변경된 건설공사 공정계획에 의거 적기에 납품이 가능하도록 납품기한을 연기함

□ 변경계약 내용

품 명 (납품요구번호)	계약금액		납품기한
	당 초	변 경	당 초	변 경
무정전전원장치 (12-19-2-56419-00)	***********	****	**********	**********
비상발전기 (12-20-2-81378-00)	***********	****	**********	**********
빌딩자동제어장치 (12192197100)	************	****	**********	**********
조명기구 (12-20-6-26966-00)	***********	****	**********	**********
LED실내조명등 (12-20-1-05131-00)	**********	****	**********	**********
LED실내조명등 (12-20-1-05135-00)	***********	****	**********	**********

※ 다수공급자 물품은 2개월이상 연기 불가하여 기존 계약 해지 후 재계약

□ 건설사업관리기술자 의견

○ 건축공사 준공기한이 연장됨에 따라 변경된 건설공사 공정계획에 의거 적기에 납품이 가능하도록 납품기한을 연기하는 것이 적정함

4		조치계획

□ 건설사업관리단의 의견과 같이 관급자재의 납품기한을 연기함이 타당하다고 판단되므로 계약부서로 변경계약 의뢰하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 :  건설사업관리단 검토의견서 각1부.  끝.