		동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	상도119안전센터 청사 공간재배치 및 환경개선공사 설계변경 계획

1. 관련근거

가. 소방행정과-8231(2021.08.20.)호『상도119안전센터 청사 공간재배치 및 환경개선 공사』

나. 소방행정과-10319(2021.10.22.)호『상도119안전센터 청사 공간재배치 및 환경

개선 공사 계약 체결보고』

2. 2021년 10월25(월) 기 착공된「상도119안전센터 청사 공간재배치 및 환경개선공사」와  관련하여 다음과 같이 설계변경(추가발주)을 추진 하고자 합니다.

가. 사 업 명: 상도119안전센터 청사 공간재배치 및 환경개선 공사

나. 공사기간: 2021. 10. 25. ~ 11. 21.

다. 사    유: 식당 방화문 교체 등 겨울철 보온을 위한 필수환경개선 필요

라. 설계변경(추가발주) 내용

- 방화문(옥상, 식당, 2층 대기실, 차고) 4개소

- ABS도어 3개(대기실 출입문 교체)

- 체력단련실 및 복도 계단 등 페인트 작업 150㎡, 아크릴 파티션 4개,

- 보일러 분배기 3개, 수보대데스크 1개

마. 설계변경 금액: 금10,035,000원(금일천삼만오천원)

※ 예산과목: 소방관서 시설물 유지보수/시설비(401-01)

붙임  1. 상도119안전센터 청사 공강재배치 공사계획(추가발주) 1부

2. 추가견적서 1부.  끝.

담당자							정은택			장비회계팀장					代김효중					소방행정과장					이기주				소방서장						11/16 代이기주
협조자
시행			소방행정과-11205									(						)		접수											(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로16길 55 동작소방서															/			http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화								/전송			02-843-7119					/													/	부분공개(5)