투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	노을공원 노후포장 정비공사 폐기물처리용역 설계변경 시행

1. 시설과-6097(2021.10.19)호 및 6755(2021.11.15.)호와 관련입니다.

2.『노을공원 노후포장 정비공사 폐기물처리용역』설계변경을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 노을공원 노후포장 정비공사 폐기물처리용역

나. 용역기간 : 2021. 9. 6. ~ 12. 4.

다. 용역개요 : 노을공원 노후포장 정비공사 폐기물 처리

라. 계 약 자 : ******************************

마. 계약금액 : 금41,305,000원

바. 설계변경 내용

구 분		당 초	변 경	증 · 감
도급비	공 급 가 액	금 37,550,000원	금 53,077,273원	15,527,273
	부가가치세	금 3,755,000원	금 5,307,727원	1,552,727
	계	금 41,305,000원	금 58,385,000원	17,080,000

사. 예산과목 : 서부공원녹지사업소 공원운영과, 세계적인 환경·생태 테마공원 육성, 산하공원 운영, 월드컵공원 시설물 보수정비, 시설비 및 부대비, 시설비

아. 변경사유 : 실 공사에 따른 물량 변경 및 폐아스콘 일부 폐콘크리트로 변경

첨 부 : 1. 방침서 1부.

2. 설계변경내역서 1부. 끝.

주무관	정종광		토건시설팀장	송석주		시설과장	임종훈		서부공원녹지사업소장	11/16 이용우
협조자	재무팀장	代민운기
시행	시설과-6769	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화		/전송	300-5569	/		/	부분공개(5)