문서번호	교량안전과-17343
결재일자	2021. 11. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
안창용		박찬규	11/17 조현석
협조

「광진교 난간 보강사업(조형난간 제작·설치)」

설계변경(정산) 검토 보고

2021. 11.

안전총괄실

(교량안전과)

「광진교 난간 보강사업(조형난간 제작·설치)」

설계변경(정산) 검토 보고

『광진교 난간 보강사업(조형난간 제작·설치)』설계변경 사항에 대한 책임건설사업 관리기술인 검토 의견서가 제출되어 이에 대한 검토 보고 임.

1		관련근거

□ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제15장 물품계약 일반조건 제6절(수량조절과 계약금액 조정)

□ 설계변경도서 제출(동기공2021-6613, ‘21.11.12)

2		공사개요

□ 공 사 명 : 광진교 난간 보강사업(조형난간 제작·설치)

□ 공사기간 : ‘21.06.04. ~ ’21.11.22

□ 도 급 자 : **************

□ 도 급 비 : **********

□ 공사개요 : 조형난간 설치 2,066m

3		설계변경 주요내용

□ 추가작업(낙하물방지망 재설치) 반영(교량안전과-14464, ‘21.9.17)

○ 낙하물방지망 재설치 : 263m(강변북로, 올림픽대로 상부)

- 신규공종 협의단가 적용

· 물량 증·감 : 계약단가 적용

· 신 규 비 목 : 낙찰율 적용(설계변경당시 산정한 단가에 낙찰률 협의 적용 함)

□ 제경비 정산 반영

○ 건강보험료, 연금보험료, 퇴직부금, 환경보전비 등

□ 공사물량 및 공사비 증·감

○ 물량 증·감

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증.감	비 고
*******	*******	*	*****	*****	***	*************
**********	********	*	*	***	***	*******
*******	************	*	***	*	****	************************************
	*****	*	*	***	***

○ 공사비 증·감

(단위 : 천원)

공 종	규 격	당 초	변 경	증.감	비 고
계				******
*******	*******	***********	*******	******
**********	********	*	******	******
*******	************	******	*	*******
	*****	*	******	******

4		설계변경 검토 결과

□ 책임건설사업관리기술자 의견

○ 설계변경사항

- 주요수량 및 공사비 : 적정, - 제경비 변경 : 적정

(건강보험, 국민연금보험, 고용개선지원비 등 )

○ 설계변경 적용단가

- 기존비목 : 계약단가 적용, - 신규비목 : 낙찰율 (91.82%) 적용

□ 공사비 증·감 내역

(단위:원)

********	*****	****	*****		***
****	585547,470	610,710,000	증	25,162,530
공급가액	532,315,882	555,191,910	증	22,875,028
부가가치세	53,231,588	55,519,090	증	2,287,502

5		조치의견

□ 상기 검토결과와 같이 건설사업관리단에서 보고한 설계변경은 적정한 것으로 판단되므로 설계변경하고 변경계약 시행하고자 함

붙 임 : 1. 감리단 설계변경 검토 보고서 1부.

2. 설계내역서 1부.  끝.