(발주처 작성서식)

실정보고 검토서

공 사 명

잠실대교 남단IC 연결체계 개선공사(조경)

공사개요

· 위    치 : 잠실대교 남단

· 규    모 : 폭1차로, 3.33㎞

(교량 33m, 지하차도 300m)

· 공사기간 : ‘20.12.01.~’25.11.29.

· 도 급 비 : 390억원

· 시 공 사 : 삼환기업㈜ 외 1개사

· 감 리 단 : ㈜동해종합기술공사 외 2개사

· 설 계 사 : ㈜제일엔지니어링 외 2개사

실정보고 건명

지장수목 이식

***************************

실정보고 사유

실착공 시 관계기관 재협의에 따른 지장수목에 대한 의견 반영

- 송파구청 협의결과    (지정장소 이식: 교목 76주, 관목 2,430주)

- 서울시설공단 협의결과(지정장소 이식: 교목 11주, 관목   100주)

- 한강사업본부 협의결과(지정장소 이식: 교목   0주, 관목   590주)

건설사업관리단

검토의견

- 지장수목 이식에 대한 수량 변경은 관계기관의 협의 결과를 따르고 있으며, 이식장소 또한 관계기관의 현지 조사를 거쳐 적정히 선정됨

공기에 미치는 영향

해당없음

변경(안)

- 변경사항 및 공사비 증감사항

구 분			수 량		*******		*** ********
			당 초	변 경	***	***
조경공사
교목	R20 외	주	48	87	5,912	14,947	9,035
관목	H2.0 외	주	500	3,120	8,541	31,847	23,306
직접비					14,453	46,794	32,341
간접비					6,447	21,406	14,959
도급비					20,900	68,200	47,300

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

해당사항 없음

발주처

검토의견

- 본 실정보고는 실 착공 전 관계기관 현장 입회 하에 재 조사를 거친 협의결과를 반영한 부득이 발생한 사항으로, 본 실정보고가 타당함에 따라 승인처리하고 추후 설계변경 반영코자 함.

비 고

************************

결재

주무관

김현곤

공원시설과장

이병호

방재시설부장

전결 11/17

박홍봉

협조

주무관

김규희