“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	준공기한 연기에 따른 변경계약 의뢰(월계로 외 2개소 장기사용 송배수관 정비공사)

우리 사업소에서 시행 중인 아래 공사와 관련하여 교통심의 일정 지연 등으로 인한 준공기한 연기에 따른 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 월계로 외 2개소 장기사용 송배수관 정비공사

나. 계약업체: ***************

다. 계약금액: ************

라. 준공기한 연기

- 당초: 2021. 5. 24. ~ 2021. 11 .26.

- 변경: 2021. 5. 24. ~ 2021. 12. 27.

마. 귀책소재: 중부수도사업소

바. 지체상금 부과여부: 미부과

사. 연기사유: ************************************ 등

붙임  1. 준공기한 연기 보고서(소장님 방침) 1부.
2. 준공기한 연기 요청 공문 및 실정보고 각 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	이승환		시설관리팀장	代유형근		시설관리과장	11/17 김상웅
협조자
시행	시설관리과-26761	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가)	/
전화	3146-2205	/전송	3146-2239	/	leesh79@seoul.go.kr	/	부분공개(5)