“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	공사 실정보고서 제출 회신(지봉로 장기사용 송배수관 정비공사)

1. 서울시설공단 공사감독2처-15665(2021. 11. 18.)호와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 감독 중인「지봉로 장기사용 송배수관 정비공사」와 관련하여 제출한 현장실정 보고에 대해 아래와 같이 회신하고자 합니다.

- 아   래 -

가. 기존관 철거 불가 사유로 인한 폐쇄 조치

- 1구간 총 연장 140m 중 70m는 기존관 철거, 나머지 구간 70m는 통신, 전기 및 배수관(D300) 등 지장물로 인한 폐쇄 조치

- 설계변경 시 공종 변경사항 반영

붙임  실정보고 검토 1부.  끝.

	중부수도사업소장
★주무관	임상근		시설운영팀장	이유찬		시설관리과장	전결 11/18 김상웅
협조자	주무관	이보민
시행	시설관리과-26881	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	3146-2195	/전송	3146-2239	/	limsangkeun@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)