문서번호	건축부-18555
결재일자	2021. 11. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
손남기		차무흥	11/18 代유현수
협 조

『광역소공인 특화지원센터 건립공사』

외부계단(노출콘크리트) 레미콘 규격변경 검토보고

2021. 11.

도시기반시설본부

(건  축  부)

『광역소공인 특화지원센터 건립공사』

외부계단(노출콘크리트) 레미콘 규격변경 검토보고

***********************************************************************************

**********************************************

1		사업개요

○ 공 사 명: 광역소공인 특화지원센터 건립공사

○ 위    치: 성동구 아차산로17길 9(성수동2가)

○ 규    모: 지하2층/지상7층, 연면적 2,711.05㎡

○ 사 업 비

차수	계약금액(원)	계약기간	비고
**	*************	***********************
**	**************	***********************	준공
**	*************	***********************

○ 시공/감리: 세이브건설(주)외 2/(주)포스코에이앤씨건축사사무소

○ 공 정 율: 53%

2		추 진 경 위

○ ‘20. 06. 30. : 공사착공

○ ‘20. 07. 31. : 지상 지장물(기존건물) 철거

○ ‘21. 09. 06. : 1차공사 준공

○ ‘21. 11월 현재. : 골조공사(지상4층)

3		실정보고 내용

○ 검토근거

- 당초 외부계단은 설계심의 시 노출콘크리트로 설계되어 있으나 시방서 부재

- 국토부의 “외장용 노출콘크리트 건설기준’ 적용 필요함[제정(2021.2.18.)]

- 건설기준

건설기준	주요내용	제정 또는 개정
KCS 14 20 60 : 2020	·현장타설 외장용 노출콘크리트의 재료 및 시공에 대한 기본적인 기준제정	제정(2021.2.18)

○ 건설기준 주요내용 반영

*************************************

******************************************

*************************************************

○ 검토내용

가. 레미콘 변경내용

**********************************************

*********************************************************************

***********	****	****	***	****
***** **********	*	**********	**********	**** ******
***	*	*********	*********
***	*	*********	*********
***** **********	***********	***********	*************	****
**	***********	***********	*********

4		건설사업관리자 검토의견

********************************************

5		설계자 검토의견

****************************************************************************************************

************************************

6		처리의견

************************************************************

붙임 : 실정보고 공문(건설사업관리단). 끝.