투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	노을공원 자연물쉼터 조성 공사 준공 및 납품기한 연기 시행

시설과-6843(2021.11.17.)호와 관련, 『노을공원 자연물쉼터 조성 공사 』에 대하여 다음과 같이 준공 및 납품기한을 연기하고자 합니다.

1. 도급공사

◯ 공 사 명 : 노을공원 자연물쉼터 조성 전기공사

◯ 계약금액 : 금31,300,000원(삼천일백삼십만원)

◯ 업 체 명 : 주식회사 대광사업단

◯ 변 경 전 : 2021. 11. 23.

◯ 변 경 후 : 2021. 11. 26.

2. 관급자재

◯ 건    명 : 노을공원 자연물쉼터 공원등 관급자재 구매

◯ 구매금액 : 금21,716,640원(이천일백칠십일만육천육백사십원)

◯ 업 체 명 : 주식회사 이티스

◯ 납품요구번호 : 12-21-6-00731-00

◯ 변 경 전 : 2021. 11. 20.

◯ 변 경 후 : 2021. 11. 26.

3. 연기사유 : 선행공정의 공사일정에 따른 준공 및 관급자재 납품기한 연기

4. 귀책소재 : 서울특별시 서부공원녹지사업소(지연배상금 미부과)

붙임 : 방침서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	홍용현		기전시설팀장	代홍용현		시설과장	11/18 代고봉채
협조자	재무팀장	양근대
시행	시설과-6851	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화	300-5560	/전송	300-5569	/	bluemoon5922@seoul.go.kr	/	대시민공개