문서번호	시설보수과-9726
결재일자	2021. 11. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김태윤		임준빈	11/18 최규동
협조

농축기동 슬러지 공급설비 정비공사

실정보고 조치 및 설계변경 시행 계획

2021. 11.

중랑물재생센터

(시설보수과)

농축기동 슬러지 공급설비 정비공사

실정보고 및 설계변경 시행 계획

우리센터에서 추진 중인 농축기동 슬러지 공급설비 정비공사와 관련하여 계약상대자로부터 실정보고 건이 제출되어 검토결과 및 조치계획 임.

******************************************

********************************************

Ⅰ

사업개요

□ 사 업 명 : 농축기동 슬러지 공급설비 정비공사

□ 사업내용 : **************************

□ 사업기간 : 2021. 7. 9. ~ 2021. 12. 8.

□ 계약금액 : *********

□ 계 약 자 : ***************

Ⅱ

추진내용

□ 작업요청 사항(발주처 → 계약상대자)

구 분	주 요 내 용	비 고
**	******************************************** ********************************************** **************************** ********************************************* ******************************************	****** ********* **************
**	****************************** *******************************	****** ********** **************
**	************************************* **************************************	*********

□ 설계변경 사항

공 종	변 경 내 용	증 감 액	비 고
작업발판, 작업대 추가 제작설치	잡철물 2,401.1㎏ 증가	**********	**
	방청 도색 35㎡ 증가	*******	**
흡입헤더 수정 보완	게이트밸브(STS) 2개 증가(200A×1, 250×1)	*********	**
	STS용접부속 증가(350A 티×3, 플랜지 3개 등)	*********	**********
기존배관/밸브 철거・변경 제작설치	기존 125A배관 철거 및 설치	*********	**
	시료채취용 볼밸브 반영(15A, 25A 각 8개)	*******	**
전자유량계 내역 변경 (사급 → 관급)	유량계(200A, 10㎏) 제외	***********	**
경비 및 부가세		**********
고 재 처 리 비		*********
합 계		*************

□ 신규단가 : 조정요율 적용(93.873%)

○ 관련 법령에 따라 신규비목의 단가는 계약당사자 간에 협의하여 결정하며, 다만 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 그 단가에 낙찰률을 곱한 금액의 50/100으로 적용

- 이에 신규비목 13종에 조정요율(93.873%) 적용

・(낙찰율 87.745%+100%) × (50/100) = 93.873%

□ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제74조 4항

3. 지방자치단체에서 설계 변경을 요구한 경우(계약상대자에게 책임이 없는 사유로 인한 경우를 포함한다)에는 제1호와 제2호에도 불구하고 증가된 물량 또는 신규비목의 단가는 설계 변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 그 단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위에서 계약당사자 간에 협의하여 결정한다. 다만, 계약당사자 간에 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 다음 계산식에 따라 계산한 금액으로 한다.

[설계 변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가 + (설계 변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가 × 낙찰률)] × 50/100

□ 고용개선지원금(PS단가) 신규항목 반영(’21.7.1. 시행)

○「고용개선지원비 공사원가 반영 및 집행 매뉴얼」변경 시행에 따른 PS단가 신규항목(보험료 건설일용근로자 납부분 및 고용개선장려금) 반영

□ 공사비 변경내역

구 분	변 경 내 용			비 고
	당 초	변 경	증/감
도급비계	***********	***********	**********
공급가액	***********	***********	**********
부 가 세	**********	**********	*********

Ⅲ

조치계획

□ 실정보고 내용 검토결과

○ 실정보고 내용을 검토한 결과 변경내역이 기 작업요청 내용과 비교하여 적합하고 신규비목에 대한 협의율이 관련 법령에 따라 적정하게 산정

○「고용개선지원비 공사원가 반영 및 집행 매뉴얼」의 변경시행에 따라 진행 중인 공사에 국민연금・건강보험료・고용개선장려금을 반영해야 하며, 그 금액이 적정하게 산출

PS단가 항목	산 출 식	산출금액
주휴수당	**************************************	**********
보 험 료	*******************************	*********
고용개선장려금	**************************************	*********
합 계		**********

□ 설계변경 시행

○ 실정보고 내용을 검토결과를 계약상대자에게 통보하여 변경사항을 승인하고 변경된 사항을 반영하여 설계변경 시행

□ 향후 추진계획

○ 2021. 11.  검토결과 통보 및 설계변경 시행

○ 2021. 12.  준공검사 완료 및 준공처리

붙임  1. 실정보고 제출 공문 1부.

2. 실정보고서(원가계산서, 도면) 1부.

3. 고용개선지원금 반영 안내 공문 1부.  끝.