문서번호	시설관리과-19648
결재일자	2021. 11. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
조광희	조규환	11/18 代조규환
협 조

「미아동699-31 ~698-29 외7개소 장기사용배급수관 정비공사」

현  장  실  정  보  고

2021. 11.

현  장  실  정  보  고

『미아동699-31 ~ 698-29 외7개소 장기사용배급수관 정비공사』와 관련하여 감독업무 수행중인 서울시설공단으로부터 현장실정보고서(1구간 토공 터파기 인력비율 조정)가 제출되어 검토결과를 보고드림.

□ 추진근거

○ 현장실정 보고서 제출 **********************************

□ 공사현황

○ 공 사 명 : *************************************

○ 공사개요 : **************************

○ 공사기간 : *************************

○ 도 급 비 : ************

○ 도 급 자 : *************

□ 보고내용

○ 1구간(D=80mm, L=93m)은 직관부, 연결부 및 변실부의 토공 터파기 인력비율이 당초 10%였으나, 협소한 소형고압블록(L=70m, B=3m) 구간은 지하매설물(하수도, 가스, 통신 등) 저촉으로 인한 기계굴착 작업에 제한이 있음.

○ 협소한 소형고압블록(L=70m, B=3m) 구간은 지하매설물이 밀집되어 있어 지하매설물 보호와 안전한 시공을 위해 직관부, 연결부, 변실부의 토공 터파기 인력비율을 30% 상향 조정함이 타당한 것으로 판단됨.

○ 계략공사비 : 증)1,000천원

○ 위치도 및 현황사진

□ 검토결과

○ 서울시설공단에서 제출한 현장실정보고(1구간 토공 터파기 인력비율 조정)에 대하여 검토한 결과 상기 보고내용과 같이 적정하므로 승인 통보하고 추후 설계변경시 정산하여 반영코자 합니다.

2021. 11.

보고자 : 지방시설주사   조 광 희

붙임  현장실정 검토보고 및 실정보고서 1부. 끝.