투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	계약변경(준공기한) 의뢰 (동북권 아동 청소년 예술교육센터 및 종합체육센터 건립 소방공사)

우리본부(설비부)에서 시행 중인 『동북권 아동 청소년 예술교육센터 및 종합체육센터 건립 소방공사』에 대하여 아래와 같이 계약변경(준공기한) 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 동북권 아동 청소년 예술교육센터 및 종합체육센터 건립 소방공사

2. 공사위치 : 서울특별시 강북구 미아동 811-2

3. 계약업체 : 주식회사 태영이엔티 대표 이태구, 동광소방설비(주) 대표 김대수

4. 계약금액 및 기간

구분	계약금액(원)	계약기간	비고
**	*************	********************************
**	***********	********************************

5. 준공기한 변경(연장) 내역

가. 변경사유 : 선행공정(건축공사) 암반굴착공정 지연 등으로 후속공정인 소방공사 1차수 및 총차수 준공기한 연장

나. 준공기한 변경(연장)

구분	계약금액(원)	계약기간		비고
		당초	변경
**	*************	********************************	********************************	****
**	***********	********************************	********************************	****

※ 계약금액 변경 없음

다. 귀책기관 : 서울특별시 도시기반시설본부(지체상금 미부과)

라. 예산과목

- 서울시 : 문화시설과, 문화도시기반조성, 문화예술시설 건립, 아동청소년 예술교육센터 건립 지원, 시설비

- 강북구 : 문화관광체육과, 체육시설 확충, 체육시설 관리, 강북구 종합체육선터 건립, 자치단체등이전, 자치단체간부담금

붙임  1. 합의각서 1부.

2. 준공기한 연기보고서 1부.

3. 감리단 준공기한 연기 요청 공문 1부.  끝.

	설비부장
주무관	표창구		건축설비과장	배수웅		설비부장	11/18 代김현기
협조자
시행	설비부-16455	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층 설비부 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8629	/전송	02-3708-8659	/	ddongpar@seoul.go.kr	/	부분공개(5)