코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	설계변경 계약 의뢰[광진교 난간 보강사업(조형난간 제작설치)]

우리시와 계약체결하여 시행중인 『광진교 난간 보강사업(조형난간 제작설치)』에 대하여 설계변경(정산)계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 광진교 난간 보강사업(조형난간 제작설치)

나. 공사기간 : 2021.06.04. ~ 2021.11.22.

다. 도 급 자 : ㈜디자인큐나인********

라. 설계변경(정산)

(단위 : 원)

구 분	****	****	*****	***
*******	585,547,470	610,710,000	증) 25,162,530
공 급 가 액	532,315,882	555,191,910	증) 22,875,028
부가가치세	53,231,588	55,519,090	증) 2,287,502

○ 설계변경사유 : 공사물량 변경 및 제경비 변경 반영

마. 예산과목

○ 교량안전과, 교량관리, 한강교량관리, 광진교 난간 보강, 시설비 및 부대비, 시설비

○ 교량안전과, 교량관리, 한강교량관리, 한강대교 안전난간 설치, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 : 1. 설계변경 정산시행 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부. 끝.

	교량안전과장
주무관	안창용		교량관리팀장	박찬규		교량안전과장	11/18 조현석
협조자	계약총괄팀장	임영미		재무과장	권순기
시행	교량안전과-17408	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 신관3층 (태평로1가)	/
전화	02-2133-8122	/전송	02-768-8905	/	ahncy69@seoul.go.kr	/	부분공개(5)