문서번호	시설관리과-26955
결재일자	2021. 11. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	시설관리팀장		시설관리과장		중부수도사업소장
최준혁	代유형근		김상웅		11/19 김정애
협 조

준공기한 연기 검토보고(정릉동 202-58 ~ 168-29호 외 9개소 장기사용 배급수관 정비공사)

2021. 11.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

.

준공기한 연기 보고

우리사업소에서 시행중인 『정릉동 202-58 ~ 168-29호 외 9개소 장기사용 배급수관 정비공사』가 추가 작업지시 및 민원 등으로 절대공기가 부족하여 준공기한을 연기하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

※ 시설관리공단 상수도감독2처-15656(2021.11.18)호 공사기한 연기 검토보고서 제출

Ⅰ				공 사 현 황
		c

□ 공 사 명 : 정릉동 202-58 ~ 168-29호 외 9개소 장기사용 배급수관 정비공사

□ 공사기간 : 2021. 04. 29 ~ 2021. 11. 24

□ 공사개요 : D=80~300㎜,  도급비 : 488,625,000원

□ 도 급 자 : 마천건설(주) 대표 : 김 평 화

□ 현공정률 : 90%(완료공정(타절구간 포함) D=80~300mm, L=1360m, 잔여공정 4구간 분기연결)

Ⅱ				연기요청 사유
		c

□ 추가 작업지시 및 대규모 단수

○ 지방단체 공사계약일반조건 제8절 2항 계약기간의 연장에 해당하는 사유가 발생

-  발주기관의 책임으로 착공이 지연되거나 시공이 중단되었을 경우

☞ 지연일수 : 15일(기존 1구간중 도면과 상이하고 단절관으로 되어있어 순환관망 형성하고자 추가 작업지시 및 1구간 대규모 단수로 인한 민원해결 및 원인파악으로 지연 15일)

Ⅲ				연기일수산출
		c

□  연기일수 산출 15일

- 서울시설공단 감독 연기 요청일 : 15일
* (추가작업 지시 및 대규모 단수로 인한 민원 및 원인 파악15일)

※ 서울시설공단에서 제출한 연기일수 검토결과 15일이 타당하다고 판단됨.

□  준공기한 변경

○ 당초 : 2021. 04. 29 ~ 2021. 11. 24

○ 변경 : 2021. 04. 29 ~ 2021. 12. 09.

Ⅴ				조 치 의 견
		c

□ 공사 진행중 상기사항 등에 따른 작업지연으로 절대공기가 부족하며 준공기한 연기를 시행함이 타당한 것으로 사료되며,

□ 이와같은 사항으로 행정지원과에 변경계약을 의뢰하고, ***************및 서울시시설공단에 통보 준공기한 연기 조치하고자 함.

붙임 : 1. 준공기한 연기검토 보고서 제출(시설관리공단) 1부.

2. 준공기한 연기 요청서(마천건설(주)) 1부.

3. 준공기한 연기 사유 및 예정공정표 1부.

4. 준공기한 연기원검토 보고서 1부(시설관리공단).  끝.