“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	공사 실정보고 회신(정릉동202-58 ~ 168-29호 외 9개소 장기사용 배급수관 정비공사_10차)

1. 공사감독2처-15655(2021.11.18.)호와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 감독중인『정릉동 202-58 ~ 168-29호 외 9개소 장기사용 배급수관 정비공사』의 공사 실정보고에 대하여 우리사업소 검토의견을 회신하며,

3. 아래와 같이 추가 작업을 지시하오니 공사감독 업무 및 공사장 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

- 아       래 -

현황 및 문제점(공단 보고내용)	사업소 검토의견
□ 포장도종 변경 ○ 당초설계는 도종이 A-2로 설계되어 있으나, 굴착결과 CA-2도로로 확인되어 도종변경 및 폐기물물량 변경이 필요한 상황. □ 인력굴착 비율증가 ○ 4구간의 당초설계는 직관부 인력비율이 ***로 설계되어있으나, 지장물(가스, 하수관 등)이 다수 존재하여 인력굴착이 반복적으로 병행됨에 따라 인력굴착 비율을 ***로 조정 반영이 필요한 상황. □ 일부구간 확폭 ○ 굴착결과 지장물(가스, 하수관 등)로 부설이 불가하여 일부구간에 대하여 확폭이 필요한 상황. □ 횡단굴착 개소 증가 ○ 기존관 확인 및 관로 선형 계획을 위한 횡단굴착 추가 시행필요.	************* **************************************************** *************** ********************************************* ************* ******************************************************** **************** ******************************************************

끝.

	중부수도사업소장
주무관	최준혁		시설관리팀장	代유형근		시설관리과장	11/19 김상웅
협조자
시행	시설관리과-26950	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	3146-2206	/전송	3146-2239	/	cjh123@seoul.go.kr	/	부분공개(5)