코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 변경 요청(남산 회현자락 한양도성 유적전시관 조성공사)

남산 회현자락 한양도성 유적전시관 조성공사와 관련하여 사용할 관급자재(철근)를 구매계약하였으나 계약자의 철근수급에 어려움이 있어 납품기간 연장요청이 있어 협의후 알려드리니 납품기한을 변경해 주시기 바랍니다.

가. 계약건명: 남산 회현자락 한양도성 유적전시관 조성공사 관급자재 구매

나. 구매방법: 조달구매(G2B)

다. 구매 품명 및 수량: 철근(붙임 참조)

라. 변경사항

납품기한 변경	변 경 전	변 경 후	비고
	2021.11.30.	2022.3.30.	4개월 연장

마. 귀책사유: 계약자

※ 한국철강******************관계자와 사전 협의완료

붙임: 관급자재 분할납품 요구서(참고용) 1부.  끝.

	한양도성도감과장
주무관	왕승찬		도성관리팀장	이원재		한양도성도감과장	11/19 백운석
협조자
시행	한양도성도감-10245	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서울시청 서소문 청사 1동 5층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2671	/전송	02-2133-1063	/	vivawang@seoul.go.kr	/	부분공개(6)