문서번호	방재시설부-14760
결재일자	2021. 11. 22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		조경시설과장	방재시설부장
유진이		현학범	11/22 박홍봉
협조

조경분야 설계변경 계획안 검토결과

(광복교~안양교 도로확장공사 실정보고 관련)

도시기반시설본부

방 재 시 설 부

광복교~안양교 도로확장공사 실정보고

조경분야 설계변경 계획안 검토결과

관련 공종의 계획 변경 및 민원 등으로 인하여, 설계변경이 필요하여 설계변경 계획(안)을 보고하는 내용으로, 이의 없어 승인하고자 함.

□ 보고개요

○ 보 고 자 : 책임건설사업관리기술인 김구환

○ 보고과정(시공사 → 건설사업관리단 → 본부)

□ 시공사) 실정보고 승인요청[KCC(광안)-715-374호(2021.11.09.)호]

□ 관리단) 조경공사 실정보고[광안건-423(2021.11.11.)호]

○ 보고요지 : 설계변경 필요성 및 계획안, 변경시 공사비 증감 등

※ 광복교~ 안양교 도로확장공사 개요 ※

◦ 공사구간 : 남부순환로(구로구 개봉동 ~ 구로동)

◦ 공사기간 : 2016. 4. 1. ~ 2121. 12. 31. (현재 잔여기간 40일)

◦ 공사내용 : 도로확장(4~5차로→6차로), 보도신설 및 수목식재

◦ 총공사비 : 70,479백만원(조경483백만원)

◦ 시공사/감리사 : (주)KCC건설/동부엔지니어링(주) 외 2

□ 보고내용

사유별 설계변경안

○ 토목분야 변경에 따른 변경

- 도로 진․출입로 변경 및 방음벽 추가로 인한 식재계획 변경

- 보도 설치 공법 변경(블럭포장→합성목재데크)으로 인한 식재계획 변경

･ 기존 녹지의 식재계획 취소(훼손 없음), 보・차도 경계부분 띠녹지 추가

○ 현장여건에 따른 변경

- 훼손지 추가발생(안양천 사면, 구일로 교통섬 녹지 등)에 따른 복구계획 마련

･ 교목 8주, 관목 4,330주. 지피 990본 추가

○ 민원(협의 포함)에 따른 변경

- 인수기관(구로구, 광명시) 협의결과 및 민원사항 일부 수용

･ 화목류(배롱나무, 이팝나무), 상록관목류(눈향나무, 황금사철) 추가 식재

○ 설계 미흡으로 인한 경우별 계획

- 설계미흡) 가로수종 변경은 가로수 심의가 선행되어야 함에도, 심의 없이 당초부터 왕벚나무로 계획하여 설계 준공(기존수종 : 은행,버즘)

※ 설계당시 인수기관(구로구)의 요청을 반영하여 왕벚나무로 계획

- 경우별 계획

① 심의 통과(원안)시, 계획대로 왕벚나무 식재  ※ ’21. 12. 7.(화) 심의 예정

② 심의 미통과시, 왕벚나무를 제외하고 하부 띠녹지(관목)만 식재

- 사    유

･ 구로구는 자체 계획에 따라 해당 구간을 왕벚나무길로 조성해 오고 있음

･ 금회 심의가 부결되더라도, 자체적으로 절차(심의) 완료 후 왕벚나무를 식재하겠다는 구로구의 의사 확인

설계변경 시 공사비

○ 설계변경 시 공사비 : 25,388천원 축소  ※ ②의 경우 27,236천원 추가 축소

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증·감
계	483,472,000	458,084,000	감25,388,000
직접공사비	278,456,882	290,717,260	증12,260,378
간접공사비	205,015,118	146,725,173	감37,648,378

□ 검토결과

○ 설계변경(안)은, 토목 분야의 계획변경, 현장여건의 변화, 협의결과 등에 따른 것으로 이유 있다고 판단됨

○ 왕벚나무 관련 사항은 가로수 심의가 선행되어야 하는 바, 심의 부결을 대비하여 제시한 대안(왕벚나무 미식재)도 향후 인수․관리 기관인 구로구의 의사를 반영한 것으로 무리가 없다고 판단됨

□ 해당 구간과 연접한 도로에 왕벚나무가 식재되어 있음

□ 향후 처리는 구로구 부담으로 이행되므로 경제적 측면에서도 이유 있음

□ 심의 미통과 시 봄철 식재적기까지 공기연장이 필요하나 여건상 곤란

○ 보고내용과 같이 설계변경 시 총공사비 규모는 축소(25백만원)됨

□ 처리의견

○ 보고 내용에 무리가 없는 것으로 판단되는 바, 수목 식재적기를 고려하여, 승인(우선시공 허용)함이 바람직할 것으로 사료됨

○ 다만, 설계미흡 관련 사항은, 미흡의 경중과 책임소재에 따라 의법처리 및 재발방지를 위한 대책을 강구하고자 함(추후 별도 처리)

붙임  실정보고서(광안건********호) 1부.