문서번호	시설관리과-27089
결재일자	2021. 11. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
임상근	代이보민	11/22 김상웅
협 조
	주무관		이보민

『지봉로 장기사용 송배수관 정비공사』

5차 실정보고 검토

(기존관 철거에 따른 굴착단면 변경)

2021. 11.

중부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『지봉로 장기사용 송배수관 정비공사』

5차 실정보고 검토

(기존관 철거에 따른 굴착단면 변경)

『지봉로 장기사용 송배수관 정비공사』와 관련하여 책임감리 위탁 중인 시설관리공단에서 제출한 공사 실정보고에 대한 검토 보고임.

※ 시설관리공단 공사감독2처-15666(2021. 11. 18.)호

□ 공사개요

○ 공 사 명: 지봉로 장기사용 송배수관 정비공사

○ 공사위치: *********************

○ 공사개요: D= 300~700mm, L= 394m

○ 공사기간: 2021. 5. 10. ~ 2021. 12. 5.

○ 시 공 사: ****************

○ 공사감독: *****************

□ 보고내용

○ 기존관 철거에 따른 굴착단면 변경

- 당초 설계에 전구간(1~3구간) 기존관(D900, 강관) 철거를 계획하였으나,   기존관 철거에 따른 토공 물량이 증가하고, 기존관 상부(3차선)에 전기 및 통신관이 매설되어 있어 확폭 굴착(B= 2.0m, H= 2.4m)이 필요한 실정임.

- 또한 매설되어 있는 한전관로 주변은 위험의 소지가 있어 장비로 굴착이 불가한바, 인력 굴착의 비율을 증가해야 함.

- 위치도(기존관 철거 구간)

현장사진

□ 조치계획

○ 기존관 철거 시 현장에서 확인한바 3차선 기존관 상부에 통신, 전기 등 지하매설물로 인해 확폭 굴착이 필요하고, 기존관 철거로 인한 토공 물량이 증가됨이 타당하다고 판단됨.

- 기존관(D900, 강관) 철거 연장: 165m

○ 또한 신설관(D700, 주철관) 시공 시 기존관의 심도가 1.6m로 낮고, 전기 지하매설물이 상부에 매설되어 있어 굴착 인력비 조정이 필요하다고 판단됨.

○ 조치 의견과 같이 토공 물량 증가, 굴착 인력비 조정 등 변경된 내역을 향후 설계변경 시 반영하고자 함.

- 순공사비: 증)19,379천원

○ 서울시설공단(감독부서) 및 용현건설 주식회사(시공사)에 관련 내용을 통보하여 공사 시행에 만전을 기하고자 함.

붙임  공사 실정보고서 각 1부.  끝.