문서번호	도시철도설비부-10683
결재일자	2021. 11. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		설비공사과장	도시철도설비부장
김태영		임태수	11/22 김중영
협 조

『별내선 1공구 건설공사(기계공사) 공기조화기』

준공(납품)기한 연기 검토보고

2021. 11.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

『별내선 1공구 건설공사(기계공사) 공기조화기』

준공(납품)기한 연기 검토보고

우리본부에서 시행하고 있는 『별내선(8호선연장) 1공구 건설공사(기계공사)』의  공기조화기 설치시기가 미도래하여 준공(납품) 연기코자함

□ 공사개요

○ 공 사 명: 별내선(8호선연장) 1공구 기계공사 공기조화기 제작설치

○ 공사위치: 별내선(8호선연장) 1공구 BN1정거장

****************************************

○ 납품기한: 2021.12.07.

□ 연기사유 및 감리단 검토의견

○ 연기사유: 설치시기가 미도래하여 연기

○ 검토의견: 선행공정인 건축 및 기계공정 예정일은 22년 7월이므로 23년 5월까지 납품토록 연기

□ 조치계획

○ 준공(납품)기한 연기

- ************************************************************************

< 납품기한 변경 >

규격	수량	납품기한		금액
		당초	변경
Aspoh-0550st	2	2021.12.07.	2021.05.31.	변경 없음
Aspoh-0450st	1	2021.12.07.	2021.05.31.
Aspoh-0110st	2	2023.05.31.	변경 없음

○ 조치방안

- 준공(납품)기한 연기 의뢰(도시철도설비부 → 총무부)

********************************

***********************

***************************

․준공(납품)기한 연기(계약금액 변경 없음)

붙임 감리단 검토보고 1부. 끝.