“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	공사 실정보고서 제출 회신(지봉로 장기사용 송배수관 정비공사)

1. 서울시설공단 공사감독2처-15669(2021. 11. 18.)호와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 감독 중인「지봉로 장기사용 송배수관 정비공사」와 관련하여 제출한 현장실정 보고에 대해 아래와 같이 회신하고자 합니다.

- 아   래 -

가. 퇴수변 설치 및 철거 관련

- 현장 여건 상 퇴수변 설치가 불가하여, 기존 위치에 퇴수변 설치를 하기 위해 부설한 분기부(D700/300) 맞이음 처리

- 설계에 반영된 퇴수변 위치를 변경하여 다른 위치에 설치

나. 공기변 설치 및 철거 관련

- 관로 내부 에어로 인한 사고 방지를 위한 공기변(D200) 추가 설치

다. 공통사항

- 설계변경 시 변경된 물량 내역 반영

붙임  실정보고 검토 1부.  끝.

	중부수도사업소장
★주무관	임상근		시설운영팀장	代이보민		시설관리과장	전결 11/22 김상웅
협조자
시행	시설관리과-27092	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	3146-2195	/전송	3146-2239	/	limsangkeun@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)