문서번호	설비부-16602
결재일자	2021. 11. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
허진		代윤대영	11/22 김호성
협조

『동부간선도로확장 (1,3공구) 전기공사』

설계변경(2회) 검토보고

2021.  11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『동부간선도로확장(1,3공구) 전기공사』

설계변경(2회) 검토보고

『동부간선도로확장 1,3공구 전기공사』와 관련, 책임건설사업관리단의 설계변경 요청에 대하여 검토하고 보고드림

**************************************************

*******************************************************

*******************************************************

□ 공사명 : 동부간선도로확장 1,3공구 전기공사

❍ 공사위치: 노원구 월계1교 ~ 의정부 시계

- 1공구: 초안산지하차도 인근 중랑천변 산책로·스포츠시설

- 3공구: 상계주공(1~3단지, 10·11단지) / 마들지하차도·수락고가차도

❍ 공사규모: 폭(4차로→6차로), 연장 6.85km(서울시 1.4km, 광역도로 5.45km)

- 1공구: 보안등 40본(LED 50W), 조명타워 1EA (LED100W×3)

- 3공구: 가로등기구 교체 144등, LED터널등 229등 설치

❍ 공사기간: 2021.05.03. ~ 2022.01.10.

❍ 공 사 비: *****************

❍ 감 리 사: ㈜동부엔지니어링

❍ 시 공 사: ㈜남경전설

□ 관련 근거

❍ 동부간선도로확장 1,3공구 전기공사 실정보고(설비부-15672호, `21.11.4.)

- 수락고가차도 성수방향 하천변 방음벽구간 가로등 안정기함 설치

- 꺽기형 방음벽 신설구간(상계주공 10·11단지) 임시가로등 운영

❍ 동부간선도로확장 1,3공구 전기공사 변경설계서 검토보고(동부엔지니어링
(발)2021-2954호, `21.11.09.)

- 계약기간 연장 검토 (`22.01.10. 준공 → `22.07.31. 준공)

· 선행공종인 방음벽공사 순연으로 공기연장 (주민협의 및 지장가로수 제거 순연)

· 방음시설 공사 공기 부족으로 토목공사 공정계획 변경 (방음벽 완료 `22.06. 예정)

□ 설계변경 내용                                (단위: 천원)

구 분	변 경 내 용	공 사 비			사 유
		당 초	변 경	증·감
직접공사비	기존 공사	*******	*******	*
	임시가로등 운영	*	******	******	설비부-15672호 (실정보고 검토보고)
	가로등 점검구 설치	*	*****	*****
간접공사비 (부가세 반영)	건강·연금보험료, 산업안전보건관리비 등	*******	*******	******	직접공사비 증가로 인한 증액 (계약금액조정 검증시스템 검증완료)
합 계		*******	*******	******

❍ 설계변경 현황                                      (단위: 원)

구 분	설계변경 현황			비고
	당 초	변 경	증·감
*****	***********	***********	**********
****	***********	***********	****	********

□ 건설사업관리기술자 검토의견

❍ 선행공정 지연에 따른 계약기간 연장(증 6.6개월)과 실정보고
승인 내용을 반영하여 변경설계서를 적정하게 작성하였고, 설계변경 등으로 인한 계약금액 조정도 적정한 것으로 판단됨

□ 보고자 검토의견

❍ 건설사업관리기술자의 설계변경도서 검토의견 사항을 검토한 결과 적정한 것으로 판단되어 총무부에 변경계약을 의뢰코자 함

붙 임 : 1. 감리단 변경설계서 검토의견서 1부.

2. 실정보고 사항 검토보고 1부.  끝.