“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)	공사감독2처장
제목	공사 실정보고(4차) 검토 결과 회신【방배배수지(1지) 내부방식공사】

1. 서울시설공단 공사감독2처-15411(2021.11.16.)호입니다.

2. 「방배배수지(1지) 내부방식공사」 실정보고(4차) 제출 건에 대하여 검토 결과를 회신하오니 정산 및 공사 감독 업무에 만전을 기하시기 바랍니다.

□ 4차 실정보고 내용 및 검토 결과

구분	4차 실정보고 내용	검토 결과	비 고
1	철선 및 폼타이 제거 단면보수 추가 반영 6,380개소 → 6,630개소 증)250개소	원안 승인

끝.

	강남수도사업소장
안전관리팀장	홍정식		시설관리과장	11/22 김근태
협조자
시행	시설관리과-19075	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/
전화	3146-4903	/전송	3146-4939	/		/	대시민공개