코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	2021년 야생동물 피해예방 사업계획 변경

1. 관련 : 자연생태과-622(’21.1.11.), 은평구 공원녹지과 24960(’21.11.8.), 광진구 공원녹지과-18696(’21.11.9.)호

2. 2021년 야생동물 피해예방 사업계획을 아래와 같이 변경하여 추진하고자 합니다.

□ 변경계획

세부 내역	금액 (단위: 백만원)	산출내역	변경사유
합계	420	차단시설(차단펜스) 1,450m 설치 = 408,210,000원 차단시설(포획틀) 7개소 설치 = 11,790,000원	사업물량 조정 및 추가 사업대상지 발굴
차단시설	420	강북구 : 차단시설 650m 설치 등 1식 = 188,210,000원 도봉구 : 차단시설 800m 설치 등 1식 = 220,000,000원 은평구 : 차단시설(포획틀) 4개소 설치 = 6,600,000원 광진구 : 차단시설(포획틀) 3개소 설치 = 5,190,000원	*은평, 광진 추가

□ 행정사항 : 환경부(한강유역환경청) 변경계획 통보 및 사업비 교부.

붙임 1. 계획서(당초) 1부.

2. 차단시설(포획틀) 설치계획(은평, 광진) 1부.  끝.

주무관	이명희		자연자원팀장	안은란		자연생태과장	11/22 이용남
협조자
시행	자연생태과-20660	(		)	접수		(		)
우	04520		/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2151	/전송	021-2133-1083	/		/	부분공개(5)