문서번호	시설과-6946
결재일자	2021. 11. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전시설팀장	시설과장	서부공원녹지사업소장
이승준	윤상섭	임종훈	11/22 이용우
협 조
	재무팀장		양근대

하늘공원 풍력발전기 교체 설치 계약기간 연장 검토보고

2021. 11. 22.

서부공원녹지사업소

(시설과)

하늘공원 풍력발전기 교체 설치 계약기간 연장 검토보고

우리사업소에서 추진 중인『하늘공원 풍력발전기 교체 설치』관련 사용전검사 일정 조정이 불가피하여 사업 계약기간을 연장하고자 함.

□ 사업개요

❍ 건    명: 하늘공원 풍력발전기 교체 설치

❍ 위    치: 서울 마포구 상암동 481-72, 하늘공원 정상부

❍ 내    용: 풍력발전기 10kW 1대 교체 설치

❍ 계약기간: 2021. 9. 1. ~ 2021. 11. 30.

❍ 계약금액: 81,400,000원

❍ 계 약 자: ************

□ 계약기간 연장 검토

❍ 계약기간 연장 내용

구 분	계 약 기 간	비 고
당 초	2021. 9. 1. ~ 2021. 11. 30.	-
변 경	2021. 9. 1. ~ 2021. 12. 14.	14일 연장

❍ 계약기간 연장 사유

- 자가용발전설비 사용전검사를 한국전기안전공사에 신청하였으나, 계약기간 내 사용전검사 불가능하고, 12월초 사용전검사가 가능하다고 통보받음.

❍ 계약기간 연장에 따른 지체상금 부과여부 검토

- 연장사유 귀책소재: 서울특별시서부공원녹지사업소

- 지체상금 부과여부: 미부과

□ 조치계획

❍ 상기 내용을 토대로 계약기간을 연장하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

첨부  계약자 계약연장요청 공문 1부.  끝.