“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	공사 실정보고서 제출 회신(지봉로 장기사용 송배수관 정비공사)

1. 서울시설공단 공사감독2처-15668(2021. 11. 18.)호와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 감독 중인「지봉로 장기사용 송배수관 정비공사」와 관련하여 제출한 현장실정 보고에 대해 아래와 같이 회신하고자 합니다.

- 아   래 -

가. 횡단굴착 수량 증가 건

1) 공사 시행 중 현장 여건 상 시험굴착 개소 추가

- 당초: 횡단굴착 야간 8개소

- 변경: 횡단굴착 야간 40개소

- 시험굴착 개소 추가에 따른 토공 물량 증가

2) 간선도로 굴착에 따른 굴착 비율 조정

- 인력(50%), 장비(BH018, 50%)

붙임  실정보고 검토 보고 1부.  끝.

	중부수도사업소장
★주무관	임상근		시설운영팀장	이유찬		시설관리과장	전결 11/23 김상웅
협조자
시행	시설관리과-27277	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	3146-2195	/전송	3146-2239	/	limsangkeun@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)