문서번호	교통정보과-15427
결재일자	2021. 11. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		버스정보팀장	교통정보과장
김영민		代오수년	11/23 이수진
협조

「2021년 버스정보안내단말기(BIT) 설치 사업_강남권역」설계변경(정산) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 11.

「2021년 버스정보안내단말기(BIT) 설치 사업_강남권역」

설계변경(정산) 검토 보고

「2021년 버스정보안내단말기(BIT) 설치 사업_강남권역」과 관련하여 현장여건 변경으로 인한 물량 증감 및 보험료 정산에 따라 아래와 같이 설계변경(정산) 후 준공처리 하고자 보고드림.

1		개 요

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2021년 버스정보안내단말기(BIT) 설치 사업_강남권역

○ 사업규모 : BIT 120대 신설

○ 계약금액 : 금708백만원

○ 사업기간 : ’21. 5. 31. ~ 11. 30.

○ 시행사/감리사 : 한국정보기술㈜ / 신영전자통신㈜

2		설계변경 내용

□ 설계 변경 사유

○ 물량 변경

- 수전점 변경에 따른 설치불가 3개소로 설치 수량 변경(120건 → 117건)

- 지점 변경 및 굴착거리 변경에 따라 굴착 및 배관매설 물량 변경

- 시인성 개선을 위해 BIT 설치 형태를 쉘터거치형으로 변경(26개소)하여 수량 및 전기공사 물량 변경

- 굴착복구허가청 요청사항에 따른 굴착복구 변경(원인자→관리청)으로 물량 변경

○ 보험료 정산

- 건강보험료 및 연금보험료, 노인장기요양보험료 정산

- 퇴직공제부금비 및 산업안전보건관리비 정산

□ 계약금액 및 주요변경 현황

○ 계약금액 변경                                      (단위:천원)

구 분	변경 전	변경 후	증감
계약금액	********	********	*********

○ 주요변경 내용

공 종	규 격	단위	변경전		변경후		증감
			수량	금액(천원)	수량	금액(천원)	수량	금액(천원)
*********	********	*	**	*******	**	*******	*****	********
*********	********	*	*	*	**	******	*****	********
*********	********	*	*	*	*	******	*****	********
*********	********	*	**	*******	**	******	*****	********
*********	********	*	*	*	**	******	*****	********
*********	********	*	*	*****	**	******	*****	********
******	******	*	***	******	***	******	*****	******
********	***	*	*****	******	*****	******	*****	********
******* ****	************	*	*****	******	*****	******	*****	********
******* **	*********	*	*****	******	***	*****	*******	********
*****		*	*	*****	*	*****	**	*********
*****		*	*	*****	*	*****	*	*********
*********		*	*	***	*	*	*****	*********

3		감리원 검토의견

○ 시공사에서 제출한 실정보고 내용과 이를 반영한 설계변경 내역서를 검토한 결과

- 단말기(BIT) 타입 변경 및 전기공사에 대한 시공물량 수량이 적합하게 반영 되어있어 설계변경 타당함

4		검토의견 및 조치계획

○ 검토의견

- 감리원 검토의견서 확인 결과 시인성 개선을 위해 표지판형에서 거치형 설치로 수량이 조정되었고,

- 공사비용과 미사용 보험료 및 실비 보험료(국민건강, 국민연금, 노인장기요양, 퇴직공제부금비) 정산으로 인한 설계변경 사항이 적정함

○ 조치계획

- 설계변경(감액) 계약 후 준공처리 하고자 함.

5		향후 계획

○ 설계변경 계약의뢰(재무과)

○ 준공검사 실시 및 준공조서 제출(준공일:’21.11.30.)

붙임  1. 감리원 실정보고 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝.