문서번호	교통정보과-15423
결재일자	2021. 11. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		버스정보팀장	교통정보과장
김경진		代오수년	11/23 이수진
협조

「2021년 버스정보안내단말기(BIT) 설치 사업-강북권역」

설계변경(정산) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 11.

「2021년 버스정보안내단말기(BIT) 설치 사업-강북권역」

설계변경(정산) 검토 보고

우리 부서에서 추진한 「2021년 버스정보안내단말기(BIT) 설치 사업-강북권역」과 관련하여 현장여건 변경으로 인한 물량 증감 및 보험료 정산에 따라 아래와 같이 설계변경(정산) 결과를 보고 드림

1		개 요

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2021년 버스정보안내단말기(BIT) 설치 사업-강북권역

○ 사업규모 : BIT 180대 제작·설치 및 이설 5개소

○ 계약금액 : 금1,119,790,000원

○ 사업기간 : ’21. 5. 31. ~ 11. 30.

○ 시행사/감리사 : ㈜시티랩스 / 신영전자통신주식회사

2		설계변경 내용

□ 설계 변경 사유

○ 물품 변경

- 현장 여건에 맞게 독립형 단말기, 알뜰형 단말기, 미니형 단말기, 승차대 부착형 수량 조절

○ 전기공사 변경

- 지점 변경에 따라 가공거리, 굴착 거리, 포장 거리 등의 변경

○ 보험료 정산

- 건강보험료 및 연금보험료, 노인장기요양보험료 정산

- 퇴직공제부금비 및 산업안전보건관리비 정산

□ 계약금액 및 주요변경 현황

○ 계약금액 변경                                      (단위:천원)

구 분	변경 전	변경 후	증감
계약금액	**********	********	감*********

○ 주요변경 내용

공 종	규 격	단위	변경전		변경후		증감
			수량	금액(천원)	수량	금액(천원)	수량	금액(천원)
*********	*** *****	*	**	*******	*	******	*****	**********
*********	*** ******	*	*	******	*	******	*****	**********
************	*** *******	*	**	*******	**	******	*****	*********
************	*** ********	*	*	******	**	******	*****	*********
************	** ******	*	**	******	**	*******	*****	*********
************	*** *******	*	**	*******	**	*******	*****	*********
************	*** ********	*	*	*****	**	******	*****	*********
************	*** ******	*	*	******	**	******	*****	*********
***	******	*	*	******	*	*	*****	*********
*****		*	*	*****	*	*****		*********
*****		*	*	******	*	*****		*********
*******		*	*	*****	*	*	*****	*********
*********		*	*	***	*	***		*********

3		감리원 검토의견

○ 시공사에서 제출한 실정보고 내용과 이를 반영한 설계변경 내역서를 검토한 결과

- 기존 계약물량 변경과 보험료정산 등이 적정하므로 설계변경 타당함

4		검토의견 및 조치계획

○ 검토의견

- 감리원 검토의견서 확인 결과 기존 계약물량에 대한 실사결과 수전점 및 공사불가 지점이 다수 발생하여 타입 및 수량 조정되었고.

- 미사용 보험료(국민건강, 국민연금, 노인장기요양, 퇴직공제부금비) 정산으로 인한 설계변경 사항이 적정함

○ 조치계획

- 설계변경(감액) 계약 후 준공처리 하고자 함.

5		향후 계획

○ 설계변경 계약의뢰(재무과)

○ 사업 준공검사 실시 및 준공조서 제출(준공일:’21.11.30.)

붙임 : 1. 감리검토의견 1부.
2. 설계변경내역서 1부.

3. 계약금액조정검증확인서 1부.  끝.