(발주처 작성서식)

실정보고 검토서

공 사 명

올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사(조경)

공사개요

· 위    치 : 올림픽대교 남단(송파구 풍납2동)

· 규    모 : 신설 1.6㎞, 이설 1.3㎞

· 공사기간 : ‘16.04.01.~’22.12.31.

· 도 급 비 : 502억원

· 시 공 사 : ㈜덕일 외 2개사

· 감 리 단 : ㈜이산 외 2개사

· 설 계 사 : ㈜대한콘설탄트

실정보고 건명

올림픽대교 본선 수목식재 관계기관 협의의견 설계반영

*************************

실정보고 사유

관계기관 협의 의견 반영

- 서울시설공단 협의결과**************************

· 수목보호대 설치 불가에 따른 보호틀크기 변경 및 화산석 포설

· 느티나무 규격 변경(R10 → R12)

· 느티나무 조밀한 식재간격에서 7~8m로 간격 조정

· 버즘나무를 느티나무로 변경하여 통일성 유지

· 방음벽 등 일부대상지 관목 및 초화류 수종 다양화, 상록성 관목

경계식재 반영 등

· 염해피해 등 유지관리를 고려한 초종 반영(마삭줄 → 수크령)

건설사업관리단

검토의견

- 가로수 및 관목식재 등 수목식재에 대해여 관계기관(서울시설공단)의

협의결과를 설계 반영하여 공사추진함이 적정함

공기에 미치는 영향

해당없음

변경(안)

- 변경사항 및 공사비 증감사항

구 분			수 량		*******		*** ********
			당 초	변 경	***	***
본 선
수목보호대	1400	조	6	-	2,939	-	- 2,939
“	1670	조	-	6	-	1,530	1,530
소나무	R8~10		23	23	7,323	7,323	0
느티나무	R10	주	156	-	28,690	-	- 28,690
“	R12~15	주	182	332	78,288	122,151	43,863
버즘나무	B10	주	13	-	2,443	-	- 2,443
배롱나무	R10	주	-	10	-	3,834	- 508
관목류	산철쭉외	주	66,380	52,622	202,053	214,820	12,767
초화류	담쟁이외	본	20,060	46,850	40,192	61,716	21,524
잔디		㎡	2,386	2,192	12,456	11,485	- 971

구 분			수 량		*******		*** ********
			당 초	변 경	***	***
한가람로
담쟁이	8㎝	본	1,900	1,280	2,613	1,760
직접비					376,997	424,619	47,622
간접비					214,103	214,781	678
도급비					591,100	639,400	48,300

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

해당사항 없음

발주처

검토의견

- 본 실정보고는 유지관리기관의 요청사항과 현장여건 변경사항을 반영한 부득이 발생한 사항이며, 본 실정보고가 타당함에 따라 승인처리하고 추후 설계변경 반영코자 함.

비 고

************************

결재

주무관

김현곤

공원시설과장

代손병도

방재시설부장

전결 11/23

박홍봉

협조

주무관

김규희