문서번호	토목과-16421
결재일자	2021.11.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		토목팀장		토목과장		안전건설교통국장
남상현		성규상		이호진		11/23 최연우
협조

★ ◉

옥수교회 앞 보행로 이동편의시설 설치

기본 및 실시설계 용역 완료 보고

2021. 11.

	성 동 구
	(토목과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [√] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [ ] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [√] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [ ] 안전 [√] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [√]( 市균형발전정책과 ) 무 [ ]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [√]
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

옥수교회 앞 보행로 이동편의시설 설치

기본 및 실시설계 용역 완료 보고

옥수교회 앞 통행불편을 유발하는 가파른 구릉지에 수직형 엘리베이터를 설치하기 위해 추진한 기본 및 실시설계 용역의 완료 보고임

Ⅰ		추 진 근 거

○ 구릉지 이동편의 개선사업 주민공모 심사결과 알림[市-공공재생과4717(2020.4.23.)]

Ⅱ		용 역 개 요

○ 용 역 명: 옥수교회 앞 보행로 이동편의시설 설치 기본 및 실시설계

○ 기    간: ’21. 3. 3. ~ ’21. 11. 30.

○ 내    용: 수직형 엘리베이터 21인승(H=18m) 및 보행교(L=12.5m) 설계

○ 용역사: ㈜서우티이씨(대표 강대신)

○ 소요예산: (시비)111,191,000원

Ⅲ		추 진 경 위

○ ’20.04.23. 주민공모사업 사업 선정

○ ’21.03.03. 기본 및 실시설계용역 착수

○ ’21.04.28. 착수보고회 개최

○ ’21.07.22. 서울시 디자인심의 결과 접수

○ ’21.09.09. 보강통 옹벽 철거 기술자문회의 개최

○ ’21.11.01. 서울시 계약심사 결과 접수

Ⅳ		용 역 결 과

○ 설계 내용

- (토목공사) 보강토옹벽 철거 및 보강, 엘리베이터 외장재 및 보행교 설치

- (전기공사) LED스탭등 설치 및 전력 인입ㆍ간선 설비

○ 공사비 산출: 1,246,380천 원

(단위: 천원)

구 분	계	도급비	관급비	이전비
토목공사	1,222,070	1,038,295	181,322	2,453
전기공사	24,310	10,458	9,852	4,000

○조감도

Ⅴ		향 후 계 획

○ ’21.11.30.       용역 준공

○ ’21.12.~ ’22.4. 시설공사 시행.  끝.