투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	하늘공원 풍력발전기 교체 설치 계약기간 연장 시행

시설과-6946(2021. 11. 22.)호와 관련,『하늘공원 풍력발전기 교체 설치』에 대하여 아래와 같이 계약기간 연장을 시행하고자 합니다.

1. 계 약 명: 하늘공원 풍력발전기 교체 설치

2. 계약금액: 금81,400,000원(금팔천일백사십만원)

3. 계약업체: *************

4. 계약기간 연장 내용

구 분	계 약 기 간	비 고
당 초	2021. 9. 1. ~ 2021. 11. 30.	-
변 경	2021. 9. 1. ~ 2021. 12. 14.	14일 연장

5. 연장사유: 자가용 발전설비 한국전기안전공사 사용전검사 일정에 맞추어 계약기간 연장

6. 연장사유 귀책소재: 서울특별시서부공원녹지사업소

7. 지체상금 부과여부: 미부과

붙 임  1. 검토 보고서 1부.

2. 계약업체 계약연장요청 공문 1부.  끝.

	서부공원녹지사업소장
주무관	이승준		기전시설팀장	윤상섭		시설과장	임종훈		서부공원녹지사업소장	11/23 이용우
협조자	재무팀장	양근대
시행	시설과-6970	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화	02-300-5562	/전송	02-300-5569	/		/	부분공개(5)