문서번호	교통운영과-16553
결재일자	2021. 11. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		신호시설팀장	교통운영과장
박태진		박선영	11/23 강진동
협조

「2021년 교통신호기 신설 및 보수공사 감리용역(동부)」관련

설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 11.

도시교통실

(교통운영과)

「2021년 교통신호기 신설 및 보수공사 감리용역(동부)」관련

설계변경 검토 보고

「2021년 교통신호기 신설 및 보수공사 감리용역(동부)」시행중 감리수행 공사비가 증액됨에 따라 감리용역에 대한 설계변경(대가조정)을  추진코자 보고 드림.

□ 용역개요

【동부도로사업소】

○ 용 역 명 : 2021년 교통신호기 신설 및 보수공사 감리용역(동부)

○ 계약금액 : *************

○ 용역기간 : ************************

○ 계약업체 : ***************************

□ 설계변경 검토

○ 용역 계약금액 변경

(단위:원)

용 역 명	구 분	변 경 내 역			비 고
		당 초	변 경	증・감
******************************	*	***********	***********	**********	** *****
	****	***********	***********	**********
	*******	*********	*********	*******
	*****	**********	**********	*********

- 예산과목 : 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물 관리(교통사업                      특별회계), 교통신호기 신설 및 보수, 시설비 및 부대비, 감리비(401-02)

○ 설계변경 사유

- 감리수행 공사비 증액에 따른 감리용역 대가 조정

※ 관련근거 : 전력기술관리법 운영요령 제15조(대가 등의 조정) 2호 해당 공사의

설계변경으로 공사계약금액의 조정이 10퍼센트 이상 증감된 경우

○ 공사금액 변경내역

(단위:천원)

용 역 명	감리수행 대상공사비 (부가세 별도)				비고
	당 초	변 경	증・감 액	증・감 율
*********** ******************	*********	*********	***********	*********

- 공사비 증가 사유 : 도로사업소에서 추진하는 교통신호기 신설 및                             유지보수 공사(연간단가)의 공사물량 증가

□ 조치의견

○ 상기의 내용과 같이 설계변경을 시행코자 하며, 추가 소요금액에 대해서는

낙찰차액 및 집행잔액을 활용코자 함.

□ 향후일정

○ 2021. 11.    설계변경 시행 및 변경계약 체결

○ 2021. 12.    용역 준공

붙임 : 설계변경 요청 공문 등 각 1부.  끝.