“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	공사기간 변경안내(월계배수지(3지)내부방식공사)

1. 서울시설공단 공사감독2처-15864(2020.11.22.)『공사실정(준공기한 연기요청) 검토보고서   제출』과 관련하여,

2.『월계배수지(3지)내부방식공사』의 공사기간이 아래와 같이 변경계약됨을 알려드리니 관련 업무에 참조하시기 바랍니다.

◎ 계약기간

- 당 초 : 2021.05.24. ~ 2021.12.31.

- 변 경 : 2021.05.24. ~ 2022.04.29.  끝.

	북부수도사업소장
급수관리팀장	최용진		급수운영과장	11/24 代이문성
협조자	주무관	박상권
시행	급수운영과-19560	(		)	접수		(		)
우	01137	강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-3370	/전송	02-3146-3389	/		/	부분공개(5)