투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재(네트워크 스위치) 납품기한 연기 의뢰(광역소공인특화지원센터 건립 통신공사)

1. 설비부-16790호(2021.11.24.)와 관련입니다.

2. 우리 부에서 시행 중인「광역소공인특화지원센터 건립 통신공사」에 소요되는 관급자재에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 납품기한 연기내용

구 분	품 명	납품요구번호 (계약번호)	계약자	계약금액(원)	납품기한
					당초	변경(연기)
** **	*******	**************** *****************	*****	**********	**********	**********

***************************************

다. 계약금액 및 수량 : 변경없음

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임  1. 납품기한 연기 검토보고 1부.

2. 합의각서 1부.   끝.

	설비부장
주무관	강민우		환경설비과장	김현기		설비부장	11/24 김호성
협조자
시행	설비부-16830	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 무교동 96번지	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8621	/전송	02-3708-8659	/	saltman1@seoul.go.kr	/	부분공개(5)