(발주처 작성서식)

실정보고 검토서

공 사 명

동부간선도로확장(2공구) 전기공사(10차)

공사개요

· 위    치 : 도봉구 창4동 1-1

· 내    용 : 도봉지하차도 건설 및 확장

· 규    모 : L=3.2km , 4차로 → 6차로

· 공사기간 : ′21.5.4.~′21.12.15.(10차)

· 도 급 비 : 768,252,000원(10차)

· 설계사 : ㈜경화엔지니어링,

㈜나래디엔에이(건축전기)

· 시공사 : ㈜태경이엘피

· 감리단 : ㈜이산

실정보고 건명

○ 제13회 실정보고

- 시설물 인수기관 협의 요청사항 및 예비준공검사 지적사항 반영

실정보고 사유

○ 시설물 인수기관(도봉구청 물관리과) 협의 요청사항 반영

- 마들로(녹천교~창동 796) 구간 원인자 복구공사 중 중랑천 산책로 야간조도 저하에 따른 보행등 설치위치 변경(켄틀레버 옹벽→ 제방아래 산책로)

○ 예비준공검사 인수기관(도봉구청 도로과) 지적사항 반영

- 마들로 중랑천변 신설 데크보행로(250m구간)에 야간 조도 확보(보행등 설치)

- 마들로 가로등주(16본) 기초 앙카 노출에 따른 안전조치(베이스커버 설치)

건설사업관리단

검토의견

○ 마들로 가로등 설비공사(원인자 복구) 구간 내 야간 조명환경 개선, 보행자 안전 및 시설물 내구성 향상 등을 위한 실정보고 사항으로 설계도서 및 공사비 산출 내역, 단가적용 검토 결과 적정하다고 판단됨

공기에 미치는 영향

○ 해당사항 없음

변경(안)

○ 주요 변경 내용

- 보행등 이설 및 가로등설비 추가에 따른 물량 반영

공 종	당 초	변 경	사 유	금액증‧감
가로등설비공사
마들로(녹천교∼창동796) 산책로 야간 조도 미확보로 인한 보행등 이설	1등용 보행등(11본) 켄틀레버 옹벽에 설치	2등용 보행등(8본)+ 1등용 보행등(4본) 산책로로 이설	시설물 인수기관 협의사항 반영	15,372천원
가로등설비공사
마들로(중랑천변) 신설 데크보행로 조도 확보 및 가로등주 기초 앙카 노출로 인한 보행자 안전 조치	없음	보행등(8등) 및 가로등 베이스커버 (16개소) 설치	예비준공검사지적사항 반영	913천원

○ 공사비 증·감 내용

(단위 : 원)

구 분	당초	변경	증․감
도급비	*	**********	*************
관급비	*	*********	************
이전비	*	*	*
계	*	**********	*************

※ 간접비 및 부가가치세, 조달수수료 포함

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

설계변경 시행 및 변경계약 의뢰(총무부)

발주처

검토의견

시설물 인수기관 협의 요청사항 및 예비준공검사 지적사항에 대한 조치계획을 반영한 실정보고에 대하여 건설사업관리단의 검토의견이 타당하다고 판단되므로 실정보고를 승인하고 추후 설계변경하고자 함

비 고

결재

★주무관

임재욱

시책사업과장

代윤대영

설비부장

11/24

김호성